시 행	설비부-14695
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	환경설비과장	설비부장
	배수웅	이달영	12/23 代권오식

설계변경 자문회의(소위원회) 심의결과(제30차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-14283호				요청부서		환경설비과		심의일자		2014.12.23
공 사 명			선사로 ~ 고덕지구간 도로확장 전기공사
공 사 개 요			공사규모				- 위 치 : 강동구 암사동, 고덕동 일원 - 규 모 : 기존도로확장 연장:3.7km ▶ 가로등 233등 신설(MH250W. 10M용.12M용). 신호등 49개소 신설 ▶ 중계펌프장 1개소 이설
			공사기간				2009. 02. 03 ～ 2016. 01. 10.
			감 리 사				(주)한국건설관리공사외 1개사
			설 계 사				(주)트래픽스
			시 공 사				(주)홍명전기 외 1개사
심의요청사유							∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 주요 사유> 1) 선사로~고덕지구간 4차로 임시 개통에 따른 신호등 설치에 대한 설계 반영(실정보고 4건) 2) 고덕 오수 중계펌프장 이설 관련 토목(기계)부분이 펌프용량 및 펌프대수 증가로 이에 따른 전기용량에 맞추어 케이블 및 동력설비 등에 대한 설계 변경(실정보고 1건) 3) 정수장 사거리 임시개통 및 강동구청 요구사항 반영하여 가로등 추가 설치 및 이설 사항 반영 4) 가로등 미설치 구간에 대하여 조명효율이 높아 사용전력량이 적은 LED타입 등기구로 변경 등
원설계자 의견
심의결과		조건부			붙임 심의위원 지적사항 보완 조건
심의결과 조치					· 심의위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			김창균				간 사		배수웅
	위 원			김두환				위 원		이동기
	위 원			이재홍				위 원		유영선