문서번호	물재생과-7514
결재일자	2014.12.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김도형		강병수	12/23 채희정
협조

수처리 기계시설물 보수공사 연간단가  설계변경(최종) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

중랑물재생센터

(물재생과)

수처리 기계시설물 보수공사 연간단가 설계변경(최종) 보고

우리 센터에서 추진중인 『수처리 기계시설물 보수공사(연간단가)』와 관련하여 시행 중 현장 사정에 따라 발생한 물량변경에 대하여 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 수처리 기계시설물 보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2014. 5. 29 ~ 2014. 12. 31

○ 도 급 액 : 금404,244,540원

○ 도 급 자 : 대윤환경(주)  대표 안지성

□ 설계변경 사유

○ 우리 센터 2,3,4처리장 기계설비 보수 공사 시 신규공종 발생 및 시공물량

정산에 따른 수량 증․감이 발생하여 계약금액 변동 없이 물량 조정

□ 설계변경 내용

○ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
도급액	총공사비	404,244,540	404,244,540	0
	공급가액	367,495,037	367,495,037	0
	부가세	36,749,503	36,749,503	0

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터

수처리 유지보수, 시설비

□ 조치계획

○ 변경된 증감 물량내역에 대하여 설계 변경 시행하고 관리과에 계약변경의뢰

○ 설계변경내역에 따라 「수처리 기계시설물 보수공사(연간단가)」 정산처리

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서(최종) 1부.  끝.