문서번호	시설보수과-4763
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이경수		박춘배	12/23 정진오
협조
	주무관		최태석

2014년 터널·복개 및 지하차도일상유지보수공사

설계변경 검토보고(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

설계변경(2회) 검토 보고

(2014년 터널·복개 및 지하차도 일상유지보수공사)

우리 사업소에서 시행 중에 있는 『2014년 터널·복개 및 지하차도 일상유지보수공사』의 시공물량 증․감에 따른 설계변경을 시행하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

공사개요

공 사 명 : 2014년 터널·복개 및 지하차도 일상유지보수공사

공사기간 : 2014. 04. 15 ~ 2015. 02. 28

사업개요 : ○ 콘크리트 균열보수     L=860m

○ 콘크리트 표면보수     A=225㎡

○ 콘크리트 단면보수     A=165㎡

도 급 액 : 금316,452,000원

도 급 자 : 하이스트종합건설(주) 대표 목진성

Ⅱ

보고내용

설계변경 사유

▶ 시공물량 증 ․ 감에 따른 변경

▶ 저소음포장 외 28개 신규공종 발생

주요 공종 물량 증․감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증․감
콘크리트 균열보수	B=0.3mm,T=100mm	m	860	187	감 673
콘크리트 표면보수	중성화방지 T=0.6mm	㎡	225	15	감 210
콘크리트 단면보수	T=10~30mm	㎡	165	24	감 141
지하차도 집수정 준설	흡입	㎥	243	243	0
능산지하차도 포장	T=8cm, 저소음	㎡	-	3,669	증 3,669

공사비 변경내역

【단위 : 원】

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		351,352,000	572,598,270	증 221,246,270
도급비	계	316,452,000	404,679,000	증 88,227,000
	공급가액	287,683,637	367,890,000	증 80,206,363
	부가가치세	28,768,363	36,789,000	증 8,020,637
관 급 비		23,986,000	160,400,290	증 136,414,290
이전비 및 기타		10,914,000	7,518,980	감 3,395,020

예산과목

▶ 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영(도시개발특별회계), 도로시설물(터널,복개,지하차도)  일상유지보수,     시설비및부대비, 시설비

Ⅲ

조치의견

상기 내용과 같이 시공물량 증·감 및 신규 공종 발생에 따라 『2014년 터널·복개 및 지하차도     일상유지보수공사』의 설계변경 후 기성금 청구시 준공 하고자 합니다.

붙임 :  설계변경 내역서 1부. 끝