함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	차수별 금액변경 시행에따른 계약의뢰(2014년 도봉,노원구 상수도시설물 및 소화전 신설 보수공사)

우리사업소에서 시행중에 있는『2014년 도봉,노원구관내 상수도시설물 및 소화전신설, 보수공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 차수별 금액변경을 시행하고 계약의뢰코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구관내 상수도시설물 및 소화전신설, 보수공사(장기계속단가계약)

나. 계약업체 : 연단토건(주) 대표 이정수

다. 용역기간 : 2014.06.02 ~ 2015.05.31(총부기기간 : 2014.06.02 ~ 2015.05.31)

라. 차수별 계약금액 변경내역                                (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증,감
총 부기금액	417,907,590	417,907,590
1차 부기금액	300,000,000	142,428,000	감) 157,572,000
2차 부기금액	117,907,590	275,479,590	증) 157,572,000

※ 1차부기금액 미 정산에따른 차수별 계약금액 변경(총부기금액변동없음)

붙 임 : 1) 내부방침서 1부.

2) 합의서 1부.  끝

	북부수도사업소장
주무관	문병희		급수운영과장	전결 12/23 김수영
협조자
시행	급수운영과-23867	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/	mbbhh0309@seoul.go.kr	/	대시민공개