함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(건설폐기물 처리용역)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『건설폐기물 처리용역』을 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 건설폐기물 처리용역

나. 계약업체 : 서울N.E.T.(주) 대표 안성효

다. 용역규모 : 폐기물 운반 : 64.59톤, 폐기물 처리 : 64.59톤

라. 계약기간 : 2014.12.18 ~ 2014.12.29

마. 설계변경 금액 내역                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총용역비	4,629,900	2,631,310원	감)1,998,590

바. 설계변경사유 : 처리물량 감소에 따른 금액조정

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의위원회 심의결과 보고서 1부

3. 설계변경 심의위원회 개최 의견서 1부

4. 합의서 1부.  끝.

주무관	양봉우		정수시설과장	김창현		광암아리수정수센터소장	12/23 차윤기
협조자	주무관	유혜영		정수운영과장	손호철
시행	정수시설과-3452	(		)	접수		(		)
우	465-230	경기도 하남시 서하남로 293(광암동 174)	/
전화	3146-5384	/전송	3146-5309	/	ybw13@seoul.go.kr	/	대시민공개