문서번호	기전설비과-8560
결재일자	2014.12.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
유통희		서대훈	12/23 박용철
협 조
	재무회계과장			조두업

암사정수센터 약품투입기 주입설비 제작구매설치

계약기간 연장계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

생  산  부

(기전설비과)

암사정수센터 약품투입기 주입설비 제작구매설치

계약기간 연장계획 보고

암사정수센터 약품주입(AOP+Quenching)설비 제작구매설치 부대 전기공사 추진과 겨울철 O3와 H2O2 반응 시험운전 데이터 확보를 위해 계약기간을 연장 시키고자 함.

	사업개요

Ⅰ

건    명 : 약품주입(AOP+Quenching)설비 제작 구매설치

계 약 자 : 원진기계(주) 대표 정용원

계약금액 : 471,717,640원(조달수수료 미포함)

계약기간 : 2014. 11. 05 ~ 2015. 01. 04

	계약기간 연장

Ⅱ

당  초 : 2014.11.05. ~ 2015.1.4.

변  경 : 2014.11.05. ~ 2015.2.3.(30일 연장)

연장사유

- 약품주입설비 부대 전기공사 추진

- O3와 H2O2 반응이 겨울철 저 수온기(1월)에서 H2O2 소모가 증가되는  현상에 대하여 충분한 시험운전을 실시하여 최적 데이터 확보

책임소재 : 우리 본부

지체상환금 부과 여부 : 미부과

	행정사항

Ⅲ

재무회계과 : 계약기간 연장

붙임 : 계약서 및 합의서 각1부.  끝.