	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 준공기한 연기의뢰(신상도지하차도확장공사)

1. 토목부-25365호(2014.12.22.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리본부에서 시행중인『신상도지하차도확장공사』의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신상도지하차도 확장공사

나. 도 급 비 : 총괄 11,722,115,000원, 4차 98,889,000원

다. 공사기간 : 총괄 2007.12.31 ~ 2015.12.31, 4차 2010.12.30 ~ 2014.12.31

라. 시 공 사 : (유)한백종합건설 외 1개사

마. 준공기한 연기 내역(4차)

구 분	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
4차	2010.12.30 ~ 2014.12.31	2010.12.30 ~ 2015.02.28	증 59일

바. 준공기한 연기사유

- 철거대상 건물 명도소송 및 민원발생등으로 준공기한 연기

사. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

아. 지체상금부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 보고서 1부.

2) 합의각서 1부.

3) 준공기한 연기(4차)의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍상필		터널건설과장	권혁대		토목부장	12/23 노우성
협조자	주무관	박근우		계약1팀장	김점선
시행	토목부-25456	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개