함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	용역 변경계약 체결 통보[2014년 북부관내 시설물 및 소화전공사 건설폐기물 처리용역]

1. 시설관리과-19122(2014.12.22)호와 관련입니다.

2. 『2014년 북부관내 시설물 및 소화전공사 건설폐기물 처리용역』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 통보 합니다.

가. 건 명 : 2014년 북부관내 시설물 및 소화전공사 건설폐기물 처리용역(장기계속계약)

나. 계약상대자 : (주)유진개발 대표 현광복

다. 계약 기간  : 2014.06.02 ~ 2015.6.30

라. 계약 금액

- 당초 : 금차25,000,000원(총부기금액 :33,130,900원)

- 변경 : 금차10,692,000원 (총부기금액 :33,130,900원)

- 증감 : 감14,308,000원 (총 차 : 변경없음)

마. 변경사유

- 시공물량 증· 감에 따른 변경

따로붙임 : 1. 용역 변경계약 체결 통보서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 계약의뢰 공문 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	한경란		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	12/23 정의석
협조자
시행	행정지원과-22785	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	3146-3245	/전송		/	sobongh@seoul.go.kr	/	부분공개