투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(위례신도시 차집관로 증설공사 폐기물처리용역)

1. 우리본부에서 시행중인 「위례신도시 차집관로 증설공사 폐기물처리용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 위례신도시 차집관로 증설공사 폐기물처리용역

나. 용 역 비 : 46,467천원

다. 용 역 자 : ㈜보운환경 대표 안영자

라. 준공기한 연기

구분	당 초	변 경	비고
1차	2013.12.29.~2014.12.8	2013.12.29.~2015.6.30

〇 연기에 따른 귀책사유 : 계약상대자(보운환경)

〇 지체상금 부과여부 : 부과

〇 지체상금 부과금액 : 연기의뢰서 참조

마. 연기사유 : 준공기한 연기의뢰서 참조(따로붙임)

바. 예산과목 : 세입세출외 현금(위례신도시 차집관로 증설사업)

따로붙임 : 1. 준공기한 연기검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 감리 검토의견서 및 합의각서 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	김학지		방재시설과장	서관석		방재시설부장	12/23 임춘근
협조자	주무관	장수철		경리과장	허금도
시행	방재시설부-13733	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개