투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	용역 변경계약 의뢰

우리본부에서 장기계속용역으로 추진중인□한강도심생태공원확충공사건설폐기물처리용역-2차”에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고 변경예약 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강도심생태공원확충공사 건설폐기물처리용역

나. 공사위치 : 서초구 반포동 반포한강공원(서래섬주변)

다. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	총 괄			1차 (준공)	2차			장 래	비 고
	댱 초	변 경	증·감		당초	변 경	증·감
도급비	140,657,000	140,657,000	0	50,120,000	24,050,000	22,682,000	-1,368,000	67,855,000
용역 기간	‘13.9.23.~ ‘15.9.22	변경없음	변경 없음	‘13.9.23.~ ‘14.4.20	‘14.4.21~ ‘15.3.31	변경없음		~ ‘15.9.22

라. 변경사유 : 본공사 폐기물 반출수량 변경에 따른 수량 증·감

마. 공사감독 : 서울시 시설관리공단

바. 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의자연성회복 및 시민편의개선,한강생태계복원,한강생태공원확충(서래섬주변),시설비및부대비,시설비 (100-401-01)

따로붙임 : 변경내역서 1부. 끝.

	생태공원과장
주무관	김일문		생태공원과장	12/23 최병언
협조자
시행	생태공원과-2985	(		)	접수		(		)
우	133-820	성동구 강변북로 257 (성수동1가642-25)	/
전화	02-3780-0632	/전송	02-3780-0745	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개