투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 준공기한 연기 의뢰(전체2회,제2차3회,제3차3회,4차1회)

『구리암사대교 연결도로 건설공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

2. 공사개요 : 도로개설 B=31.5m, L=1,88km

3. 도 급 자 : (주)신성건설

4. 준공기한 연기현황

(금액단위 : 원)

구 분	도 급 비	착공년원일	당초준공기한	변경준공기한	비 고
2차	4,400,000,000	‘13. 7. 1	‘14. 12. 31	‘15. 2. 20
3차	5,931,635,000	‘13.12.30	‘14. 12. 31	‘15. 2. 20
4차	3,983,000,000	‘14. 7.10	‘14. 12. 31	‘15. 6. 30
전체	18,161,000,000	‘12. 8. 2	‘14. 12. 31	‘15. 6. 30

5. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 :  정수장 사거리 종단 계획고 조정으로 공사 지연, 민원에의한 대우및아남아파트 교통처리계획 지연, 대우,아남,롯데아파트 방음림 설치, 완충녹지 보상에 따른 착공 지연으로 절대공기 부족.

붙임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	박상철		광역도로과장	최광무		토목부장	12/23 노우성
협조자	계약1팀장	김점선
시행	토목부-25437	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개