내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수 주간보고(40주)

2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수사업과 관련하여 40주차 주간업무 처리 현황을 아래와 같이 보고드립니다.

아   래 -

○ 추진기간 : 2014. 12. 15. ~ 2014. 12. 19.

○ 추진사항

- 추가 및 보완개발 사항

구분	전주실적 (14.12.15~12.19)		금주계획 (14.12.22~12.26)		누적 (14.3.13~12.19)
	진행	완료	진행	완료	전체	완료	진행	지연	잔여	완료율 (%)	진행율 (%)	지연율 (%)	적기 완료율 (%)
추가개발	0	4	0	4	24	20	4	1	0	83.3	100	25	111.1
보완개발	0	2	1	1	34	31	2	1	1	91.2	97.1	50	121.6
합계	0	6	1	5	58	51	6	2	1	87.9	98.3	33.3	117.2

- 운영 및 유지보수 사항

구분	전 전주 (14.12.8~12.12)			전주 (14.12.15~12.19)			누적 (14.3.13~12.19)
	접수	진행	완료	접수	진행	완료	미완료	완료	전체
부과	16	6	15	18	5	19	5	612	617
징수	13	2	15	23	8	17	8	606	614
공통기타	4	3	3	6	4	5	4	248	252

- 지방소득세 프로그램 개발사항(‘14.12.19 기준)

구분	분석		설계		개발		테스트		시험운영		전체
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	적기 완료율
양도소득	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
종합소득	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
특별징수	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
법인소득	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
전체	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

붙임 : 1. 주간업무 현황보고(40주차) 1부.

2. ******1부.  끝.

실무사무관	김재봉		세무정보화팀장	김천억		세무과장	12/23 김근수
협조자
시행	세무과-28828	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울특별시 중구 덕수궁길 61 시청별관9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3420	/전송	02-2133-1034	/	jbkim87@seoul.go.kr	/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다