문서번호	토목부-25406
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
최진우		김영수	12/23 노우성
협조

설계변경 보고 (정산 4차 1회)

《 월드컵대교 건설공사 건설폐기물처리용역 》

2014.12.

도시기반시설본부

( 토  목  부 )

설계변경 보고 (정산 4차 1회)

《 월드컵대교 건설공사 건설폐기물처리용역 》

공사현황

❍ 용역규모 : 폐콘크리트 12,900톤, 폐아스콘 6,150톤

❍ 용역기간 : 2010. 3.22. ~ 2015. 8.22.

❍ 공 사 비 : 350,829천원

❍ 시 공 사 : 문화경기(주) 외 1개사

❍ 감 리 단 : (주)포스코엔지니어링 외 1개사

보고내용

❍ 관련근거 : 인프라토목 14-03287호(2014.12.17.)

❍ 매립폐기물 발생으로 인한 북단IC A․B램프 기존 구조물 철거지연으로 폐기물 처리물량 감소에 따른 정산

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
폐콘크리트	2,237톤	1,889톤	감 348톤
폐 아스콘	1,808톤	425톤	감 1,383톤

조치계획

❍ 책임감리업무를 수행하고 있는 포스코엔지니어링에서 제출한 정산 설계변경(4차) 내용을 검토한바 타당하기에 아래와 같이 설계변경을 시행하여 용역추진에 만전을 기하고자함

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
도 급 비	75,000천원	42,060천원	감 32,940천원

붙  임 : 감리단 공문 1부.  끝.