문서번호	급수운영과-27795
결재일자	2014.12.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		김기상	12/23 장시명
협조
	주무관		이철

상수도공사 기성(2차) 보고

「2014년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

2014. 12.

남부수도사업소

급수운영과

상수도공사 기성(2차) 보고

「2014년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

우리사업소에서 시행 중인 「2014년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」 에 대하여 계약업체로부터 정산요청서가 제출되어 아래와 같이 정산시행코자 보고드림

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명 : 2014년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D15~300㎜, L=1,782m

○ 공사기간 : 2014.05.29 ~ 2014.12.31(총공사기간 2014.05.29~2015.06.30)

○ 도 급 액 : 금645,753,740원

○ 계 약 자 : 성지이엔지  대표 정용훈

Ⅱ		기성 현황

○ 기성(정산)차수 : 2차

○ 공사기간 : 2014.08.18 ~ 2014.12.08

○ 공사시행 : D=15~300㎜, L= 815m

○ 금회(2차) 기성금 : 금313,580,000원

○ 공사위치

- 관악구 신원동 *******호외 48건         : 신설공사비

- 관악구 신림동 *******호외 39건         : 뚜껑 및 보온재 교체

- 관악구 미성동 ******호외2개소외 27건    : 직결급수전환 및 물탱크 철거

- 관악구 서림동 ***********호간외 3건    : 간선배관 정비

- 관악구 서림동 **************호간외 2건 : 세척갱생관 정비

- 관악구 난향동 ************호간등 1건   : 환경개선 정비

- 관악구 신림동 ******호외 30건          : 불용관 정비

○ 예산과목별 지출현황

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비                : 금63,778,000원

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비(보온재정비)   : 금49,973,000원

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비(직결급수전환) : 금40,315,000원

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(간선배관)     : 금34,551,000원

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(세척갱생)      : 금49,885,000원

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(환경개선)     : 금28,325,000원

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(불용관정비)    : 금46,753,000원

○ 기성지출현황

계약금액	전회 기성금액	금회(2차)기성금액	누계 기성금액	집행잔액	비고
645,753,740	111,408,000	313,580,000	424,988,000	220,765,740

Ⅲ		기성(2차) 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상없음

○ 관급 및 사급자재정산 수량 확인결과 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상없음

○ 기타 사항 : 이상없음

Ⅳ		조치 의견

○ 위 내용과 같이 기성내역 검토결과 적정하므로 2차기성을 시행코자 합니다.

붙 임 : 1. 기성요청서 1부(별도첨부)

2. 기성내역서(2차) 1부

3. 산출내역서(별도첨부). 끝.