함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관 정비공사)

1. 계약내용

가. 계약건명 : 도봉세무서 ~ 미아삼거리역간 송배수관정비공사

나. 계약업체 : 단야공영(주)  대표 김 은 숙

다. 계약금액 : \ 1,641,182,800원

라. 계약년월일 : 2014. 10. 20

마. 착공년월일 : 2014. 10. 27

바. 준공기한   : 2014. 12. 31

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한연기 : 2015. 06. 23

나. 연기사유 귀책소재 : 북부수도사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 동절기굴착통제 등으로 인한 절대공기 부족

첨  부 : 준공기한연기보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	유광창		주무관	임종진		시설관리과장	12/23 김영훈
협조자
시행	시설관리과-19152	(	2014.12.22.	)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935(번동 377)	/
전화	02)3146-3393	/전송	02)3146-3439	/	cmh0207@seoul.go.kr	/	대시민공개