문서번호	정수운영과-10570
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		손호철	12/24 차윤기
협 조
	주무관			유혜영
	주무관			김홍석

배출수처리시설 운영관리 용역

2차년도  보험료 정산 및 설계변경 보고

2014.12.

광암아리수정수센터(정수운영과)

『배출수 처리시설 운영관리용역(광암아리수정수센터)』

2차년도분 보험료정산 및 설계변경보고

광암아리수정수센터 배출수 처리시설 운영관리용역에 대한 2차년도분 보험료 사후정산을 실시하고 이에 따른 설계변경을 시행코저 함.

Ⅰ		계약현황

건  명 : 배출수처리시설 운영관리용역(광암아리수정수센터)

계약자 : (주)한미엔텍 대표 임동혁

총용역 계약기간 : 2013. 08. 13 - 2015. 08. 12

총용역 부기금액 : ￦328,390,800원(24개월)

변경 내역

구 분	당 초	변경후	증감내역
계	328,390,800	322,831,490	감(5,559,310원)
1차(2013.08.13.~12.31)	61,046,360	61,046,360	1차 변경계약(12.16)
2차(2014.01.01.~12.31)	165,477,750	159,918,440	감(5,559,310원)
3차(2015.01.01.~08.12)	101,866,690	101,866,690

※ 2014년도분 보험료 사후정산 실시에 따른 감액처리

Ⅱ		보고의견

1차년도(2013년도)용역금액중보험료(국민연금,연금보험,장기요양보험) 2,564,

700원 정산 감액하여 총용역 부기금액 330,955,500원에서 328,390,800원으로 변경됨

배출수 처리시설 운영관리용역 2차년도 용역금액을 보험료(국민연금,연금보험,

장기요양보험)정산분만큼 5,559,310원 감액코자 하며 재무과에 변경계약을       의뢰코저 합니다.

붙임 1. 2차년도 보험료정산내역 1부.

2. 합의각서 및 업체제출 증빙서류 각1부

3. 설계변경내역서 1부.

4. 1차년도 용역변경계약 체결통보서 1부.끝.