투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	준공금 지급 및 지체상금 징수 - 암사생태공원 시설확충 및 정비 통신공사

1. 생태공원과에서 시행한『암사생태공원 시설확충 및 정비 통신공사』건에 대하여 계약상대자로부터 준공금 지급신청이  있어, 다음과  같이 지급하고자  합니다.

가. 계약사항                                             (단위 : 원)

계약건명	계약업체	계약금액	계약기간
암사생태공원 시설확충 및 정비 통신공사	㈜성우음향정보통신	17,000,000	2014.9.12. ~ 2014.11.25.

나. 신청내역                                               (단위 : 원)

업 체 명	신청금액	지급금액	비 고
㈜성우음향정보통신	17,000,000	16,609,000	· 준공일자 : 2014.12.5. · 신청금액과 지급금액의 차이는 지연배상금임

다. 지급내역                                               (단위 : 원)

준공금액	선 금	준공금		잔 액	비 고
17,000,000	-	기지급액	-	391,000	· 잔액은 지연배상금으로 세외수입처리 예정이며, 세부내역은 2. 항목 참조
		금 회	16,609,000
		누 계	16,609,000

라. 지급근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(안전행정부 예규 제103호)

제6장 선금·대가 지급요령

마. 지급방법 : 계약상대자의 지급 청구에 의하여 계좌입금

바. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 생태공원 운영 및 유지관리, 시설비

2. 아울러, 위 계약 건은 공사완료가 지체되어, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조(지연배상금)에 의거 계약업체에게 아래와 같이 지연배상금을 징수하고자 합니다.

가. 지연배상금 관련 현황                                 (단위 : 원)

계약금액	준공기한	준공신고(확인요청)서 제출일자	준공검사일자 (준공일자)	지체일수
17,000,000	2014.11.25	2014.12.5.	2014.12.18. (2014.12.5.)	23일

※ 본 건은 준공기한 도과 후 준공신고서가 제출된 경우에 해당하여, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(안전행정부 예규 제103호) 제13장 제8절 1. 바. 2)에 의거 준공검사에 소요된 기간까지 지체일수에 포함시킴

나. 지연배상금 : 금391,000원(금삼십구만일천원정)

▶ 17,000,000원 * 23일 * 0.001 = 391,000원

※ 지연배상금 산출식 = 계약금액 * 지체일수 * 공사 지체상금율(1/1,000)

다. 세입과목 : 세외수입, 임시적세외수입, 잡수입, 위약금

라. 세입방법 : 고지서에 의거 징수

붙임 : 준공금 청구서류 및 준공확인요청서 1부.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 12/24 서영관
협조자	주무관	임이환
시행	총무과-19797	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개