투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	신정교외 2개소 보수공사 설계 변경 시행(최종)

우리사업소에서 시행중인 『신정교외 2개소 보수공사』에 대하여 아래와  같이 설계 변경(최종) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 신정교외 2개소 보수공사

나. 공사개요 : 콘크리트표면보수 1,207㎡, 단면보수 136㎡, 우물통보수2기 등

다. 공사기간 : 2014. 5.26 ~ 2015. 1. 20

라. 계약금액 : 575,953,400원(일금오억칠천오백구십오만삼천사백원정)

마. 도 급 자 : 태평로건설(주)  유지연

바. 변경내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		629,643,400	557,706,170	감	71,937,230
도급비	공 급 가 액	523,594,000	490,880,000	감	32,714,000
	부가가치세	52,359,400	49,088,000	감	3,271,400
	합 계	575,953,400	539,968,000	감	35,985,400
관급자재비		11,460,000	11,432,670	감	27,330
이 전 비		42,230,000	6,305,500	감	35,924,500

사. 예산과목

- 교량관리, 일반교량관리, 신정교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 오류고가보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 가리봉철도고가보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증서 1부.  끝.

주무관	이승행		시설보수과장	代류춘광		강서도로사업소장	12/24 조병준
협조자	주무관	윤신식		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-10304	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7910	/	2ss2hh@seoul.go.kr	/	대시민공개