함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(2014년 자동제어설비 유지관리용역)

우리사업소에서 시행중인 「2014년 자동제어설비 유지관리용역(장기계속단가계약)」 건에 대하여 아래와 같이 설계변경하고 변경계약을 의뢰합니다.

가. 계약건명 : 2014년 자동제어설비 유지관리용역(장기계속단가계약)

나. 계약업체 : (주)누리제어시스템 ********

다. 계약기간 : 2014.3.3~2014.12.31(총부기기간 2014.3.3~2015.2.28)

라. 설계변경 내용 : 긴급수리 물량 감소 및 신공종 발생

마. 설계변경 내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증․감액(원)	비 고
총부기금액	86,041,271	86,041,271	-	총부기금액 변동없이 금차계약금액 감액
금차(1차)계약금액	71,354,912	57,907,300	(감)13,477,612

바. 차수별 계약금액 변경사유 : 긴급수리 물량 감소 및 신공종 발생 등으로 금차계약금액 변경으로 인한 차수별 계약금액 변경(총부기금액은 변동 없음)

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,

시설장비유지비,(자동제어설비유지관리용역)

붙 임 : 1. 시행공문 1부

2. 2013년 자동제어설비 유지관리용역 감독보고 1부

3. 설계변경 내역서(총괄내역서) 1부.

4. 합의서 1부.  끝

	시설관리과장
주무관	황필권		기전팀장	손병희		시설관리과장	12/24 나태산
협조자
시행	시설관리과-34663	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2227	/전송	02-3146-2239	/		/	부분공개(6)