문서번호	시설보수과-10280
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	12/24 조병준
협조

현장 실정보고사항 검토 보고

(2014년 개봉고가차도 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

현장 실정보고사항 검토 보고

“2014년 개봉고가차도 보수공사” 관련, 철도구간(S8~10) 보수방안 검토지시에 대하여

현장 실정보고 사항이 접수되어 검토 후 처리하고자 합니다.

▷ 관련문서: 시설보수과-9714호(‘14.12.4) “개봉고가 물량정산 및 추가보수 검토지시”

- 시설관리공단 공사감독1처-13422, 13394호 (‘14.12.10) “메시휀스 설치물량 보고”

- 공사감독1처-13444, 13441호 (‘14.12.10) “중분대 연석 단면복구 등 물량보고”

- 공사감독1처-13872, 13818호 (‘14.12.17) “아스콘포장 물량조정 및 관급자재 추가구매”

- 공사감독1처-14156, 14154호 (‘14.12.22) “교면포장(SMAT-CON) 물량조정”

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : “2014년 개봉고가차도 보수공사-강서”

공사기간 : 2014.9.22 ~ 2015.3.20.

공사개요

○ 포장보수공 : 교면 재포장(SMAT-CON공법) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부(방수) 재포장 10a

○ 콘크리트보수공 : 표면보수 1,671㎡, 단면보수 62㎡, 균열보수 10m

○ 배수시설정비공 : 강관배관 448m, 곡관배관 32개소, 레듀샤 47개소, 교량배수구 관세정 370m, 배수구 구멍뚫기 43개소

○ 기타보수공 : 강재재도장 300㎡, 신축이음덮개판설치 8개소, 중분대하부덮개판설치 239m, 슈청소공 82개소, 케이블보호용덮개보수 72개소

○ 부   대   공 : 공간비계설치 1,725㎡, 보호막(분진·방진망) 설치 1,897㎡, 가설사무실·창고, 트럭크레인(10톤) 480HR 등

도 급 비 : 1,145,350,430원 (관급비 43,220천원, 이전비 91,130천원 별도)

계 약 자 : 미래건설기술(주) 대표 염일영

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		현장 실정보고 사항

1

《보도구간 메쉬휀스 설치 물량》에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 개봉고가차도 개봉사거리방향 보도구간 능형망 휀스는 지주 및 능형망 노후화로 교체가 필요한 실정임

○ 검토내용(시설관리공단)

- 현장 물량 실측결과에 따라 보도구간 능형망 휀스를 메쉬휀스로 교체 시공하고자 함

- 보수물량 조사결과 (보도구간 휀스)

연번	보수공법	규격	수량	비고
1	메쉬휀스 설치 (주간)	H=2m, W=2m, 앙카식	259.6m (130경간)	2m(1경간)
2	메쉬휀스 설치 (야간, 철도구간)	“	50.9m (25경간)	S8,9,10 (P7∼10)

- 개략공사비 : 약 82백만원

《검토의견》

○ 철도구간은 2013년도에 “2012년 개봉고가차도(철도구간) 바닥판 교체공사”에서 안전망(능형망 교체 + 낙하물방지망 설치) 보수하였으며, 효과에 비하여 비용과다

(심야작업, 철도운행관리원,철도전기안전원,열차감시원 투입, 철도공사 업무지원 수택개산금 지급 등)

⇒ 철도구간은 제외하고 능형망을 메쉬 휀스로 교체하는 것이 타당함

(개략공사비 : 약 45백만원 소요 예상)

설치구간

2

《중앙분리대 연석부 단면복구 등 물량보고》에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 개봉고가차도 중앙분리대 연석부는 높이 30cm로 콘크리트 파손 및 열화, 안전경고 도색이 훼손되어 차량 안전사고 예방을 위한 정비가 필요한 실정임

- 중앙분리대 연석부와 상부 덮개판(철재+고무판)의 실링재 노후화 및 일부구간 철재 및 고무판 찢어짐 등 손상이 있어 정비 필요

○ 검토내용(시설관리공단)

- 현장 물량 실측결과에 따라 중앙분리대 연석부 열화 콘크리트 단면복구 및 안전경고도색 시행, 상부 덮개판 및 실링재를 보수하고자 함

- 보수물량 조사결과 (중앙분리대 연석부)

연번	보수공법	규격	수량	비고
1	단면보수	EG프로텍트, t=10mm	273㎡
2	안전 경고도색	콘크리트면	304㎡
3	상부 덮개판 보수	차수 덮개	65m
4	상부 덮개판 실링재 보수	수밀코킹	543m

- 개략공사비 : 약 75백만원

《검토의견》

○ 중앙분리대 연석부 전체의 단면보수는 효과에 비하여 비용이 과다 투입되며, 하자 발생 우려가 큼

⇒ 연석부는 그라인딩으로 표면 정리(파손이 심한 곳은 부분적으로 단면보수) 하고, 측면 안전 경고도색을 시행하고, 상부 덮개판 보수도 기설치된 것과 동일하게 보수하는 것이 타당함

(개략공사비 : 약 25백만원 소요 예상)

3

《아스콘재포장 물량조정 및 관급자재 추가구매》에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 아스콘포장 현장 실측결과와 당초 설계서 상의 물량(폭, 연장)과 상이한 부분에 대하여 물량 조정 필요

○ 검토내용(시설관리공단)

- 토공부 아스콘 덧씌우기 물량과 보도부 아스콘포장 및 교면방수 물량을 현장실측 결과에 따라 조정하고자 함

- 보수물량 현장 실측결과 (아스콘재포장)

연번	보수공법	당초	변경	증감	비고
1	토공부 재포장	20.01@	21.03@	증) 1.02@	물량(폭,연장) 실측
2	보도부 재포장	10.00@	11.26@	증) 1.26@	물량(폭,연장,두께) 실측
3	보도부 교면방수	755㎡	811㎡	증) 56㎡	교량구간
4	관급자재(아스콘) 물량	595톤	610톤	증) 15톤	토공부 10톤, 보도부 5톤

- 개략공사비 증가 : 약 6백만원

- 관급자재비(아스콘) 증가 : 약 1백만원

《검토의견》

○ 토공부 및 보도부 포장 현장 실측결과를 반영하는 것으로 아스콘 및 교면방수 물량을 조정하고,

○ 관급자재(아스콘)은 증가된 물량 15톤을 추가 구매함이 타당함

4

《교면재포장(SMAT-CON) 물량 조정》에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 교면재포장 현장 실측결과 연장 및 두께가 감소하여 당초 설계서와 상이한 부분에 대하여 물량 조정 필요

○ 검토내용(시설관리공단)

- 현장 실측결과 포장 평삭두께 t=7.9~10.7㎝ 및 포장면적 감소를 반영하여 물량 조정 필요

- 보수물량 현장 실측결과 (교면재포장)

연번	보수공법	당초	변경	증감	비고
1	SMAT-CON 포장면적	2,156㎡	1,869㎡	감) 287㎡	절삭,청소,포설,양생
2	SMAT-CON 생산량	215㎥	165㎥	감) 50㎥

- 개략공사비 감소 : 약 105백만원

《검토의견》

○ 교면재포장(SMAT-CON) 현장 실측결과를 반영하는 것으로 물량 조정이 타당함

Ⅲ		처 리 의 견

○ 시설관리공단의 실정보고 사항에 대하여 각 건별 검토의견과 같이 조건부 승인 처리하고, 관급자재(아스콘) 15톤은 추가 구매코자 하며,

○ 공사비 변동사항은 도급비 한도 내에서 추후 설계변경시 반영하여 보수공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 :  현장 실정보고서 각 1부 (시설관리공단).  끝.