투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통지-레미콘(차집관거 시설물 유지보수 공사)

물재생과-7434(2014.12.22)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 통지합니다.

가. 계약건명 : 레미콘(차집관거 시설물 유지보수 공사)

나. 계약금액 : 감 금201,000원(수수료 별도 : 금110원)

- 변 경 : 금11,913,900원(수수료 별도 : 금61,110원)

- 당 초 : 금11,934,000원(수수료 별도 : 금61,220원)

다. 변경사유 : 소요물량 감소

라. 계 약 일 : 2014년  05월  14일 (변경계약일 : 2014년 12월 23일)

마. 납품기한 : 2014년  12월  20일

바. 계약방법 : 조달3자단가

사. 계약업체 : 서울경인레미콘공업(협)

(☎ 02-539-2651)

붙임 : 분할납품요구및통지 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	12/24 김홍덕
협조자
시행	관리과-15752	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	대시민공개