문서번호	토목부-25567
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장
시희식	명경출	12/24 노우성

교량구간 방호벽 및 LMC포장 물빼기공 실정보고 승인 (강남순환도로 4공구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(토목부)

교량구간 방호벽 및 LMC포장 물빼기공 실정보고 승인

(강남순환도로 4공구)

자동차전용도로 교량방호벽 위에 설치 예정인 『교량난간』과 교량상 교면포장이 콘크리트계열의 불투성 LMC포장으로 『물빼기공(유공관)』을 공종에서 제외코자 보고드림

※ 관련근거 : 교량구간 방호벽 및 LMC 포장 교면 물빼기공 검토보고(서영강남14- 407, ‘14.12.23)

□ 공사개요

ᄋ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

ᄋ 규    모 : 도로개설 폭4~8차로, 연장 2.48km

ᄋ 도 급 비 : 168,866백만원 (9차 24,402백만원)

ᄋ 공사기간 :  2001.12.29. ~ 2016. 5.19.(9차 2014. 3.13. ~ 2015. 2.28.)

ᄋ 시 공 사 : 글로웨이(주) 대표 강용호

□ 보고내용

1) 교량난간 및 물빼기공(유공관) 공정제외

○ 위치도 및 현황도

	⇒ 교량난간	물빼기공

○ 주요변경 내용

가) 자동차 전용도로에 방호벽 위 난간은 불필요한 공종으로 제외

(도면에 표기되지 않고 내역에 반영 – 기술지원감리원 검토결과 공종제외가 타당)

나) 교면포장이 콘크리트 계열의 LMC포장으로 아스팔트계열에 사용되는 물빼기공(유공관)이 불필요하여 공정 제외

○ 공사비 증․감

(단위 : 원)

비 목	당 초	변 경	증(감)	비고
총 공사비	1,128,000,000	363,000,000	감) 765,000,000
순공사비	892.222,600	287,434,620	감) 604,787,980
가) 방호벽	860,576,430	287,434,620	감) 573,141,810
나) 교면물빼기공	31,646,170	-	감) 31,646,170
제 잡 비	235,777,400	75,556,380	감) 160,212,020

□ 감리단 보고내용

1) 내역서 및 보고서 현황

공 종	설계내역(M)		검토 요청내용				비고
			내역서	도면	종합보고서	현장검토
난간 (방호벽)	본선(직결노선)	749	방호벽+난간	방호벽	방호벽	도면 및 종합보고서가 적정한 것으로 사료됨
	본선(직결연결노선)	502
	소하JCT UPRAMP	939
	소하JCT DOWN RAMP-A	1,094
	소하JCT DOWN RAMP-B	771
	소계	4,055
교면 물빼기공	본선(직결노선)	1,329	포함	포함	-	LMC포장과 ASPHALT 포장 단면도 검토결과 LMC 포장에는 교면 물빼기공 없음
	본선(직결연결노선)	528
	소하JCT UPRAMP	504
	소하JCT DOWN RAMP-A	643
	소하JCT DOWN RAMP-B	201
	소계	3,205

○ 설계자 의견

- 방호벽 위 난간 설치

: 도면 및 보고서에 나타난 바와 같이 시공에서 제외하는 것이 타당

- LMC포장면 물빼기공

: 콘크리트 포장계역인 LMC포장은 불투수층 포장에 해당되어 교면 물빼기공을 별도로 시공하지 않아도 문제가 없음

2 수량 변경현황

1) 방호벽(난간 제외)

공 종	단위	당초		변경		증.감	비고
		규격	수량	규격	수량
본선(직결노선)	m	방호벽+난간	749	방호벽	749	-
본선(직결연결노선)	m		502		502	-
소하JCT UPRAMP	m		939		939	-
소하JCT DOWNRAMP-A	m		1,094		1,094	-
소하JCT DOWNRAMP-B	m		771		771	-
소 계			4,055		4,055	-

2) 교면포장 물빼기공

공 종	단위	당초		변경		증.감	비고
		규격	수량	규격	수량
본선(직결노선)	m	유공관 (D=10mm)	1,329	유공관 (D=10mm)	-	1,329
본선(직결연결노선)	m		528		-	528
소하JCT UPRAMP	m		504		-	504
소하JCT DOWNRAMP-A	m		643		-	643
소하JCT DOWNRAMP-B	m		201		-	201
소 계			3,205		-	3,205

3. 신규단가 검토

⦁방호벽 신규 설계단가 86,182원에 강남순환4공구 협의율 82.25% 적용

구 분	단위	설계단가 (원)	낙찰율(%)	도급단가(원)	비고
방호벽	m	86,182	82.25	70,884

4. 공사비 설계변경 현황

(단위 :　원)

비 목	당초	변경	증․(감)	비고
총 공 사 비	1,128,000,000	363,000,000	-765,000,000
순공사비	892,222,600	287,434,620	-604,787,980
방호벽(방호벽+난간)	860,576,430	-	-860,576,430
방호벽(방호벽)	-	287,434,620	287,434,620
교면물빼기공	31,646,170	-	-31,646,170
제 잡 비	235,777,400	75,565,380	-160,212,020

□ 조치의견

○ 감리단에서 제출한 『교량구간 방호벽 및 LMC포장 구간 물빼기공』 실정보고를 승인하고, 추후 설계변경(소)위원회에 상정하여 결과에 따라 설계에 반영하여 정산하고자 합니다.

- 교량구간 방호벽 및 LMC포장 구간 물빼기공 제외 : 감) 765백만원

첨 부 :  감리단 검토의견서(실정보고) 1부.  끝.