문서번호	기전과-11961
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
호정오		장경옥	12/24 代김영선
협조
	주무관		구희천

2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

설 계 변 경 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  12. 24(수)

서부도로사업소

(기  전  과)

2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

설 계 변 경 보 고

2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사의 업무수행 중에 감리업체가 제출한 설계변경서 대하여 내용을 검토하고 아래와 같이 결과를 보고 드림.

1		관 련 근 거

□ 2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경      기술검토의견서 제출

○ 도로교통공단 서울특별시지부 안전시설부-65(2014.12.23.)호

2		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

□ 공사위치 : 은평노인종합복지관, 동대문디자인플라자주변,

유일약국(보), 명한철강

□ 공사개요 : 교통신호기 위치조정 및 신설(교체)

□ 계약금액 : 금15,559,000원(금일천오백오십오만구천원)

□ 공사기간 : 2014. 8. 14. ~ 2015. 2. 9.

□ 계약업체 : 신흥트래픽(주) 대표 윤 선 희

□ 감리업체 : 도로교통공단 서울특별시지부

3		설계변경 금액

공 사	당초금액	변경금액	증 감 액	비고
공급가액	14,144,546원	62,380,000원	48,235,454원
부 가 세	1,414,454원	6,238,000원	4,823,546원
도 급 비	15,559,000원	68,618,000원	53,059,000원

4		보 고 내 용

□ 실정보고 및 추가 업무지시 물량정산을 반영한 감리업체의      설계변경 내용을 검토한 바 적정 함

○ 기술검토의견서(설계변경) 붙임 참조

5		변 경 내 용

□ 물량정산에 따른 계약내역 물량변경

○ 설계변경내역서 및 설계변경도면 붙임 참조

6		조 치 의 견

□ 실정보고 및 추가 업무지시 물량정산을 반영한 감리업체의      설계변경 내용이 적정하여 이를 승인하고 설계변경을 시행      하고자 함

붙임  1. 설계변경(기술검토의견서, 설계변경내역서, 설계변경도면) 제출 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.  끝.