문서번호	현장민원과-22935
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	★강서수도사업소장
김영일		이원철	12/24 代이만섭
협조

2014년 수도계량기 교체공사 설계변경 보고 (1차수)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014년 12월

강서수도사업소

(현장민원과)

2014년 수도계량기 교체공사 설계변경 보고

(1차수 금액변경)

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2014년 강서수도사업소 관내 수도계량기 교체공사

○ 도 급 자 : 리치힐건설 (주) 대표 노창원

○ 공사기간 : 2014. 7. 4 ~ 2015. 6.30

○ 총부기금액 : 437,709,000원 (1차 계약금액 : 249,554,000원)

○ 예산 과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 민간위탁대행사업비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

□ 설계변경 내역 (1차수 금액변경)

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증감액	설계변경 사유
1. 총부기금액	437,709,000원	437,709,000원	-	총부기금액변동없이 1차계약금액 감액
2. 2차계약금액	245,554,000원	135,146,000원	감 114,408,000

□ 계약물량 정산내역

○ 만기교체외 5종 (계약수량) : 13,092개소

○ 만기교체외 5종 (작업수량) : 8,747개소

○ 잔여수량 (정산수량)           :  4,345개소

□ 향후 조치계획

○ 계약수량 변동으로 설계변경 사유가 발생된 것으로 본청 재무과에          설계변경 계약요청

○ 사업의 연속성을 감안하여 총부기금액에서 1차수 설계변경 금액을 뺀        나머지 금액에 대하여 2015년 1월초 2차수 계약의뢰 체결을 본청          재무과에 의뢰코자 함. 끝.