내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	계약기간 연장 요청

1. 도시정비과-13336호(2014.12.24)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 남산 예장자락 재생사업 관련 현황조사 및 분석 외 1건 용역의 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

[ 남산 예장자락 재생사업관련 현황조사 및 분석 용역 ]

ㅇ 용역기간 : ‘14.11.5 ~ ’14.12.31

ㅇ 용 역 비 : 금일천구백사십만원정(₩19,400,000)

ㅇ 용역수행자 : (재)서울연구원(대표 김수현)

[ 남산 예장자락 재생사업관련 기본구상도 작성 등 용역 ]

ㅇ 용역기간 : ‘14.11.17 ~ ’14.12.31

ㅇ 용 역 비 : 금일천구백사십만원정(₩19,400,000)

ㅇ 용역수행자 : ㈜해안종합건축사사무소(대표 윤세한)

나. 변경내용 : 계약기간 연장(금액 변동 없음)

[ 남산 예장자락 재생사업관련 현황조사 및 분석 용역 ]

ㅇ 당초 : ‘14.11.5 ~ ’14.12.31

ㅇ 변경 : ‘14.11.5 ~ ’15.02.28

[ 남산 예장자락 재생사업관련 현황조사 및 분석 용역 ]

ㅇ 당초 : ‘14.11.17 ~ ’14.12.31

ㅇ 변경 : ‘14.11.17 ~ ’15.02.28

※ 연장사유 : 과업기간 절대부족으로 용역기간 연장을 통하여 소기의 과업목표를 달성하자고자 함

붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 각1부.

3) 합의각서 각1부.  끝.

	도시정비과장
주무관	김지호		도시재생팀장	홍선기		도시정비과장	12/24 김성보
협조자
시행	도시정비과-13442	(		)	접수		(		)
우	100-842	서울특별시 중구 을지로 23 서울시청 을지로청사 2층 도시정비과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2171-2692	/전송	2171-2715	/	karch@seoul.go.kr	/	대시민공개