문서번호	기술심사담당관-20221
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제390호

				시 민
주무관	심사총괄팀장	기술심사담당관		행정2부시장
조창길	이철	최진선		12/24 이건기
협 조
	도시안전실장		조성일

외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(12월)

2014. 12.

서 울 특 별 시

기술심사담당관

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	외부전문가 기동점검반	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(12월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 외부전문가 기동점검단의 12월중 활동결과에 대하여 보고 드림

점검개요

2014. 12. 2.(화)	2014. 12. 9.(화)	2014. 12. 20.(토)	2014. 12. 23.(화)
가양유수지 복합센터 건립공사	가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사	장지교 삼거리 입체화시설 건설공사	군자차량기지 북부검수고 증설 및 부속건물 신축공사
강서구(건축과)	강서구(안전치수과)	SH공사(토목3팀)	서울메트로(건축팀)
’14.01.10.~’15.03.10.(63%)	‘12.03.19.~’14.12.31.(42%)	‘12.01.13.~’15.01.11.(68%)	‘12.12.27.~’15.07.06.(55%)
· 연세대학교 홍갑표 · 한림구조컨설팅 정석봉 · 이아건설 최광현 (직원 : 건축심사팀 3)	· ㈜ 지오닥 장경수 · 한국건설안전기술원 성경익 · 대한이엔씨 박주경 (직원 : 기술관리팀 2)	· 한맥기술 박윤규 · ㈜유케이이앤씨 유병률 · ㈜진우엔지니어링 안삼현 (직원 : 토목심사팀 2)	· 다원구조기술사 강정임 · 세진에스씨엠 채흥석 · ㈜미공간 유병학 (직원 : 건축심사팀 3)

중점 점검사항

❍ 복합센터 건립 관련 구조물 품질 및 시공관리 전반

- 마감공사에 따른 콘크리트 품질관리 및 자재관리 상태

- 가설시설물 시공 상태 및 안전관리 상태 등

❍ PC박스 부설 구간 품질관리 및 가시설 시공 관리 전반

- PC박스 콘크리트 구조물 균열발생 여부 등 시공 적정여부

- 박스 부설구간 안전난간 설치 및 가시설 안전성 확보 여부

❍ 터널 시공 구간 가시설 및 구조물 시공 구간 품질‧안전관리 전반

- 가시설 시공 구간 작업공간 확보 및 안전관리 상태

- 아치 박스 구조물 철근 배근, 콘크리트 품질 등 시공관리 상태

점 검 결 과

□ 시정이 필요한 사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	환경·시민 불편·기타
계	37	17	19	1
장지교 삼거리 입체화시설 건설공사	10	4	5	1
가양유수지 복합센터 건립공사	7	6	1	-
가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사	5	3	2	-
군자차량기지 북부검수고 증설 및 부속건물 신축공사	15	4	11	-

□ 분야별 주요내용

안전관리 분야

- 유수지 복합센터 현장내 가설 전선이 바닥에 방치되어 안전사고 우려

- 하수박스 시공 관련 기존 박스와 신설 박스 사이 작업구간 가시설 설치 미흡

- 터널 가시설 시공 구간 협소로 굴착장비 운영 시 충돌 위험 내포

품질관리 분야

- 신축 건물에 접합되는 철골보 주변 철근 노출 및 단면 결손 발생

- 하수 PC박스 일부 구간에 미세 균열 발생

- 아치 터널구간 철근 장기간 노출로 부식 발생 우려

환경‧기타 등

- 터널 굴착부 작업장 내 바닥 물 고임 발생으로 배수로 정비 필요

현장별 주요 지적사례

장지교삼거리 입체화시설 건설공사

· 위    치  : 송파구 장지동 일원

· 사업개요  : 연장L=1.27Km, 폭B=18~24m

· 공사금액  : 636.2억원

· 공사기간  : 2012.01.13 ~ 2015.01.11(68%)

· 시공/감리사 : 진흥기업㈜ / 수성 Eng

· 추진공종  : 시점 구조물공, 중앙터널 시공 등

○ 아치 터널구간 Sta.0+920지점 측벽 가시설 하부 지층 노출

⇒ 측벽 가시설 하부의 지층 노출면 부석 정리 후 숏크리트 시공 등 보완 조치할 것

○ 종점부 가시설(H-Pile) 사이 구간의 굴착장비 작업중 저촉 우려

⇒ 가시설 사이 구간의 장비이동 및 작업 중 가시설과 충돌, 저촉되지 않도록 신호수 배치 및 안전시설 등 보완 할 것

○ 터널 굴착부 작업장 내 바닥 물고임 발생

⇒ 터널 굴착부 배수로 정비 등 조치할 것

○ 아치 박스구간 철근 장기간 노출로 부식발생 우려

⇒ 콘크리트 타설 전 철근 녹 제거 및 방청처리  보완 후 시공토록 조치할 것

○ 아치 터널구간(Sta.0+840주변) 중앙벽체에 설치한 신축이음부가

하단부와 미연결

⇒ 하단부와 신축이음이 미연결된 구간은 온도신축에 의한 손상방지를 위해 균열유도 시공 등을 검토하여 보완할 것

가양유수지 복합센터 건립공사

· 위    치 : 강서구 양천로 61길 101(가양유수지 내)

· 사업개요 : 지상3층 /연면적 6,569㎡

· 공사금액 : 13,470백만원

· 공사기간 : 2014.1.10. ~ 2015.3.10.(63%)

· 시공/감리 : 근복공영 / 단에이엔씨

· 추진공종 : 마감공사

○ 현장 내 가설전선 관리 부적정

⇒ 이동분전반 추가설치로 가설전선 최소화 및 안전 조치할 것

○ 지상1층(도서관) 계단 안전난간 돌출 등 설치 미흡

⇒ 계단부 안전 난간을 보완 조치할 것

○ 도서관 및 체육관 사이 주차장 측 가설비계 설치 부적정

⇒ 구조안전성 검토 후 수평, 수직 간격조정 및 횡보강 등 조치할 것

가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사

· 위   치  : 서울시 강서구 가양이마트 주변 일대

· 사업개요  : 하수암거 신설 2.5×2.5@3 340m, 3.0×3.0@3 330m 등

· 공사금액 : 85.6억원

· 공사기간 : 2012.3.19. ~ 2014.12.31.(42%)

· 시공/감리 : 용일토건/서울시설공단

· 추진공종 : 기존박스 철거 및 PC박스 부설, 복공판 설치 등

○ 기존 박스와 신설 박스 사이의 작업구간 가시설 설치 미흡

⇒ 토압지지 벽체 중앙부 균열 일상점검 실시 및 유사시 중간부 엄지말뚝 설치 필요

○ 시공중인 PC박스 일부 구간에 미세 균열 발생
⇒ 균열 발생 부위 조속히 보수 조치 할 것

○ PC박스 설치 단부 작업자 등 추락 위험 내포

⇒ 표준안전난간(H=0.9m, 중간대 설치)으로 보완 설치할 것

군자차량기지 북부검수고 증설 및 부속건물 신축공사

· 위    치 : 성동구 용답동 223-2군자차량기지 내

· 사업개요 : 지상4층/연면적 17,356.3㎡

· 공사금액 : 86억원

· 공사기간 : 2012.12.27. ~ 2015.07.6.(55%)

· 시공/감리 : 아이에스동서㈜/ 자체감리

· 추진공종 : 지상1층 골조공사 중

○ 기존 검수고에 접해 추가 설치 검수고 점검대로 인한 전체 구조검토 미흡,

낙하물 방지망 및 수평부재 안전로프 미설치

⇒ 구조 설계자의 안전검토 필요 및 낙하물 방지망 철골 수평부재 안전로프 설치 및 신호수를 배치할 것.

○ Conc 기둥과 철골 Base Plate사이 간격 유지재 미설치

⇒ 무수축 Grouting전 최소 4곳 이상 간격 유지재를 보완할 것

○ 신축 RC 건물에 접합되는 철골보 주변에 철근노출 또는 단면결손 발생

⇒ 노출철근 부식제거 및 방청후 Grouting 조치 및 철골보 주변에 무수축 몰탈 처리할 것

지적사항 조치

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보