내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행중인 「서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 타당성조사 및 기본계획 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 타당성조사 및 기본계획

2. 계약자 : ㈜유신 외 1

3. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2014. 12. 28

- 변 경 : 2015.  2. 28

4. 귀책사유 : 서울특별시

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.
2. 준공기한 연기방침서 1부.
3. 용역계약 변경합의서 1식. 끝.

	도로계획과장
주무관	김정식		민자사업팀장	정회원		도로계획과장	12/24 형태경
협조자
시행	도로계획과-16964	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110(태평로1가 31) 10층	/
전화	2133-8073	/전송	2133-0763	/	kjungsik@seoul.go.kr	/	대시민공개