함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(도봉산역~도봉파크빌아파트간 송배수관정비공사)

1. 우리 사업소에서 서울시설관리공단에 위탁감독 시행중인 “도봉산역~도봉파크빌 아파트간 송배수관 정비공사”에 대해 계약금액조정검토(상수도사업본부 재무회계과-16762)심의를 마치고 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 도봉산역~도봉파크빌 아파트간 송배수관 정비공사(1차)

나. 도 급 자 : 주용종합건설(주)  대표 임병배

다. 공사기간 : 당초 ⇒ 2014. 6. 9 ~ 2014. 12. 31

변경 ⇒ 2014. 6. 9 ~ 2015. 03. 10

라. 계약금액 변경내역                                              (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감
계약금액(도급액)	316,739,900	460,880,000	증) 144,140,100

마. 설계변경사유  : 신규 공종 및 시공 물량 증․감에 따른 계약금액 변경

바. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후송배수관정비- 21102)

따로붙임 : 1. 계약금액 조정검토결과 관련 서류 1부

2. 설계변경내역서 및 산출서 1부

3. 보고서 1부.  끝.

주무관							문병희				급수운영과장					김수영					북부수도사업소장					12/24 이종백
협조자				주무관							송시훈					주무관							한경란					주무관								김종필토
시행			급수운영과-23959										(						)		접수												(						)
우	142-062					서울 강북구 한천로 935																/
전화		02-3146-3342							/전송			02-3146-3389					/	mbbhh0309@seoul.go.kr													/	부분공개(6)