문서번호	토목부-25667
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장
이석근	조성만	노우성	12/24 代강홍기

진출램프 추진에 따른

설계변경 실정보고

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

진출램프 추진에 따른

설계변경 실정보고

「도시고속도로 연결램프(화랑로 진·출입)설치 실시설계용역」이 지역주민

반대민원 및 BRT사업계획변경으로 인해 유보되었던 진출램프가 추진됨에

따라 설계용역비 증가에 따른 설계변경(준공기한 연기) 실정보고임.

관련근거

도로계획과-16761(2014.12.22) : 사업계획의 조정통보

용역개요

용역명 : 도시고속도로 연결램프(화랑로 진·출입)설치 실시설계

위  치 : 화랑대역 주변

규  모 : 진입램프(B=5m, L=638m)

용역비 : 547,000천원

기  간 : 2013. 1. 9. ~ 2014.12.31.

과업추진현황

2011. 5. 31    : 기본설계용역 완료

2013. 1.  9    : 실시설계용역 착수

2013. 1.~ 3.  : 업무협의(경춘선 폐선부지 공원화사업 및 BRT사업)

2013. 4.~ 6.  : 노선변경안 세부검토(묵동IC내) 및 관할구청 협의

2013. 8.~ 9.  : 기본설계(안) 공람공고

2013. 9.~     : 노원구청장,이노근 의원 등 방문설명

- 기본설계(안) 반대 및 묵동IC내 변경안 긍정적

2013. 9. 30   : 주민설명회 개최(공릉2동 주민센타)

- 기본설계(안) 절대반대 및 묵동IC내 변경안 수용

2013.10.~    : 각 노선에 대한  경제성 및 타당성 검토

2013.12. 2.  : 노선안 추진방안 검토요청(본부→도로계획과)

2013.12.12.  : 화랑램프 추진 노선안 조정통보(도로계획과)

- 묵동IC내 진출램프 장기안 검토, 진입램프 추진

2014. 4.17.  : 묵동IC내 진입램프 주민공람공고

2014. 7.23.  : 서울시민디자인심의

2014.10.22.  : 건설기술심의

2014.12.22.  : 묵동IC내 진출램프 설계추진 통보(도로계획과→본부)

2014.12.23.  : 설계용역비 협의(본부→용역사)

2014.12.24.  : 설계용역비 협의완료(용역사→본부)

계약금액 변경 및 준공기한 연기

계약금액 변경

구분	위 치	규 모	설 계	금 액(원)	계	비 고
당초	묵동IC	진출램프 (B=5m,L=847m) 진입램프 (B=5m,L=638m)	타 당 성 조 사	146,300,000	547,000,000	(증) 484,349,000
		진입램프 (B=5m,L=638m)	기본 및 실시설계	400,700,000
변경	묵동IC	진출램프 (B=5m,L=847m)	기본 및 실시설계	484,349,000	1,031,349,000
		진출램프 (B=5m,L=847m) 진입램프 (B=5m,L=638m)	타 당 성 조 사	146,300,000
		진입램프 (B=5m,L=638m)	기본 및 실시설계	400,700,000

※ 계약금액 변경사유 : 진출램프 설계추진에 따른 기본 및 실시설계용역비 증액

준공기한 연기

- 당초 : 2012. 12. 28 ~ 2014. 12. 31

- 변경 : 2012. 12. 28 ~ 2015. 12. 31

※ 연기사유 : 진출램프 설계 시행에 따른 용역기간 추가소요됨.

향후 추진계획

- 2014.12.26. : 설계변경 재계약 및 준공기한 연기

- 2015.12.31. : 설계용역 완료.

붙 임 : 1)협의회신 문서 1부.

2)준공기한 연기의뢰서 1부.

3)관련 공문서 사본 각 1부.  끝.