내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	(주) 유신 대표이사 박찬식
(경유)
제목	준공기한 연기 알림

1. 서울시정 발전을 위해 적극 협조하여 주시는 귀 사에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 사와 계약 체결하여 시행중인 「서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 타당성조사 및 기본계획 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기할 예정임을 알려드리오니 변경계약 체결 등 필요한 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2014.12.28

- 변 경 : 2015. 2.28

나. 연기사유

- 친환경공간 확보방안 재검토 및 종합기본계획 수립 등 추가기간 소요로  절대공기 부족. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김정식		민자사업팀장	정회원		도로계획과장	12/24 형태경
협조자
시행	도로계획과-16972	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110(태평로1가 31) 10층	/
전화	2133-8073	/전송	2133-0763	/	kjungsik@seoul.go.kr	/	대시민공개