함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약의뢰(목1동외17개동상수도공사)-1차수

우리사업소에서 시행하고 있는『2014 목1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 차수별 부기금액 조정을 시행하고 변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014 목1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : 만석공영(주) 대표 윤정숙

다. 공사기간 : 2014. 6. 17. ~ 2014. 12.31.(총부기기간: 2014.06.17 ~ 2015.06.30)

라. 예산과목

- 상수도사업비,영업비용,급수공사비,신설공사비

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선교체비(수도관교체비)

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비(지원사업성시설비)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

마. 변경사유 : 차수별 물량 증 ․ 감 발생

바. 차수별 변경금액                                           (단위 : 원)

구 분	총부기금액		1차수 (2014년)		2차수 (2015년)		증·감
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
총공사비	726,381,020	726,381,020	490,000,000	484,934,000	236,381,020	241,447,020	변경없음
도 급 비	566,381,020	566,381,020	400,000,000	391,512,000	166,381,020	174,869,020	변경없음
관 급 비	160,000,000	160,000,000	90,000,000	93,422,000	70,000,000	66,578,000	변경없음

첨부 : 1. 설계변경내역서(1차수)  1부.

2. 합의서(1차수) 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	유인행		급수운영과장	12/24 조면행
협조자
시행	급수운영과-31046	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	대시민공개