문서번호	건축부-15407
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		건축관리과장	건축부장
전재진		代전재진	전결 12/24 代강성욱
협 조

「신림2 빗물펌프장 설치건축공사」

감리자 실정보고 검토 결과 보고

- 설계도서 조정 관련 -

2014. 12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「신림2 빗물펌프장 설치공사」

감리자 실정보고 검토 결과 보고

- 설계도서 조정 관련-

『신림2 빗물펌프장 설치공사』감리자로부터 제출된 외장공사에 대한 공사수량변경 요청사항 등 현장 적용에 따른 설계도서 조정 실정보고를 검토 보고

□ 공사개요

○ 위    치 : 관악구 신사동 496번지 일원

○ 건립규모 : 지상2층, 연면적 820.04㎡

○ 공사기간 : '13. 01. 04 ～'14. 12. 15

○ 건축공사도급액 : 1,556백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링

○ 현 공 정 : 외장공사중(공정율 75%)

□ 추진경위

○ 2014.07.01. : 건축공사 착수

○ 2014.12.23. : 책임감리원 실정보고

□ 실정보고 내용

○ 신림2 빗물펌프장 설치공사 중 건축분야 마감공사와 관련 설계도서 변경부분에 대한 설계변경

- 설게변경 사항

․ 알루미늄시이트 설치공사 수량변경

․ 메탈판넬 설치공사 수량변경

․ 세라믹판넬 설치공사 수량변경

․ PIN HOLETRUSS 설치공사 수량변경

․ 티타늄판넬 설치공사 수량변경

․ 스틸 치장접기 설치공사 수량변경

․ 사택 및 관리실 외부 이중창 설치 등

□ 공사비 증감

○ 변경금액 : 감)68,919천원                             (단위:원)

구분	공 종		금 액			비고
			당 초	변 경	증, 감
1	알루미늄시이트 설치 공사수량 변경		22,925,865	45,854,858	증) 22,928,993
2	메탈판넬설치공사 수량변경		38,603,834	36,883,869	감) 1,719,965
3	세라믹판넬 설치공사 수량변경	진회색	77,279,517	36,186,541	감) 41,092,976
		연회색	57,666,912	26,640,377	감) 31,026,535
		Y색	40,981,562	18,882,465	감) 22,099,097
4	PIN HOLETRUSS 설치공사 수량변경		62,137,836	35,258,648	감) 26,879,188
5	티타늄판넬설치공사 수량변경	돌출이음	31,459,270	65,171,091	증) 33,711,821
		평이음	35,137,814	22,083,098	감) 13,054,716
6	스틸치장접기설치공사수량변경		2,754,039	4,031,990	증) 1,277,951
7	사택 및 관리실 외부 이중창문 설치		-	9,034,043	증) 9,034,043
합 계			368,946,649	300,026,980	감) 68,919,669

□ 감리단 검토 의견

○ 설계도면과 수량산출서의 불일치등 물량변경 사항 및 사용자 요구사항에 대하여 검토한 결과, 설계변경 사항이 타당하다 판단되어 실정 보고

□ 처리의견

○ 책임감리원의 의견이 적정하다 판단되므로 우선 선시공하고 추후, 실정보고 사항에 대하여는 설계변경 처리코자함.

붙 임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.