함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	계약기간 연장 의뢰

1. 재무회계과 – 14619(2014. 11. 11)호 물품조달 계약 결과와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 약품투입기 주입설비 제작 구매설치건에 대하여 아래와 같이 계약기간을 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건명 : 약품중입설비 제작 구매설치

나. 계약자 : 원진기계(주) 대표 정용원

다. 계약기간

- 당초 : 2014. 11. 5 ~ 2015. 1. 4

- 변경 : 2014. 11. 5 ~ 2015. 2. 3(30일 연장)

라. 연장사유

- 약품주입설비 부대 전기공사 추진

- O3와 H2O2 반응이 겨울철 저 수온기(1월)에서 H2O2 소                      모가 증가되는 현상에 대하여 충분한 시험운전을 실시                      하여 최적 테이터 확보

붙임 : 1.계약기간 연장계획 방침서 1부.

2. 계약서 및 합의서 각1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	유통희		기전설비과장	12/24 서대훈
협조자
시행	기전설비과-8578	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개