문서번호	물재생과-7529
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	12/24 채희정
협조
	주무관		김근수

중랑물재생센터 준설토 운반 및 처리용역(연간단가)

설계변경 보고(1차) 및 준공기한 연기

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

중랑물재생센터

(물재생과)

우리 센터에서 시행중인 『2014년 중랑물재생센터 차집관거 준설토 운반 및 처리용역(연간단가계약)』일환으로 청계천 청계1구역 준설공사 준공연기에 따른 준설토 발생 처리 계약 물량 증가에 대하여 설계변경 및 준공기한 연기를 시행코저 함.

중랑물재생센터 준설토 운반 및 처리용역(연간단가)

설계변경 보고(1차) 및 준공기한 연기

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 중랑물재생센터 차집관거 준설토 운반 및 처리용욕(연간단가)

○ 총공사비 : 120,293,900원 (도급비-120,293,000원)

○ 시 공 사 : (주)이오개발 대표 이은숙

○ 공사기간 : 2014. 06. 20 ～ 12. 31.

2		보고내용

○ 설계변경 사유 : 계약물량 증감과 설계변경 및 공기연장

○ 설계변경 내용 : 계약물량 증감

- 주요공종 설계변경내용

공 종	규 격	단위	수 량
			당초	변경	증,감
차집관거 준설토운반 (청계3구역 야적장)	L=43.05Km 24톤덤프	㎥	2,500	3,500	증)1,000

○ 설계변경 금액                                              (단위 : 원)

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감
총공사비		121,717,900	170,874,000	증)49,156,100
도급비	공급가액	109,358,091	155,340,000	증)45,981,909
	부가가치세	10,935,809	15,534,000	증)4,598,191
	계	120,293,900	170,874,000	증)50,580,100
이 전 비		1,424,000	-	감)1,424,000

○ 공사기간 연장

- 계약기간 연기사유

ㆍ준설공사 기간 연장에 따른 준설토 발생에 따른 설계변경소요와 운반        및 처리기간 부족으로 계약기간을 연기코자 함.

- 준공기한 변경

ㆍ당 초 : 2014. 06. 20 ~ 2014. 12. 31

ㆍ변 경 : 2014. 06. 20 ~ 2015. 02. 27

- 지체상금 부과 검토

ㆍ연기사유 귀책소재 : 중랑물재생센터

ㆍ지체상금 부과여부 : 미부과

3		조치내용

○ 위와 같이 공사 계약물량 증ㆍ감 수량에 대하여 낙찰율 적용(87.748%)  반영에 따른 설계변경후 재계 약코자 하며, 계약금액 부족분은 차집관로  공통분야 미집행 금액을 활용함과 준공기한을 연기코저 함.

붙  임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝