투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수처리 기계설비 보수공사 연간단가 설계변경(최종) 시행

1. 물재생과-4387(2014.9.1.)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 시행 중인 ‘수처리 기계설비 보수공사(연간단가)’에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 수처리 기계설비 보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 대윤환경(주),  대표 김우진

다. 공사기간 : 2014. 5. 29 ～ 2014. 12. 31

라. 변경내역(계약금액 변경없음, 내역 변경)

구분		당 초 설 계	변 경 설 계	증·감
총 공사비		404,244,540	404,244,540	0
도급비	공급가액	367,495,037	367,495,037	0
	부가가치세	36,749,503	36,749,503	0
	계	404,244,540	404,244,540	0

마. 변경사유 : 신공종 발생 및 수량 증·감에 따른 변경

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터

수처리유지보수, 시설비(소규모수선비)

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서(1차) 1부.   끝.

★주무관	김도형		물재생과장	강병수		중랑물재생센터소장	12/24 채희정
협조자
시행	물재생과-7567	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02)2211-2560	/전송	02)2211-2579	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개