함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기 시행(전체, 4차분)

1. 시설과-6986호(2013.10.26)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역』의 준공기한(전체, 4차분)을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역

나. 용역개요 : 건설폐기물 운반 3,275.6㎥, 처리 7,686톤

다. 계 약 일 : 전체  ’11. 7. 27(4차분 ’13. 7. 25)

라. 용역기간 : 전체  ’11. 7. 29. ~ ’13. 10. 31.

4차분 ‘13. 7. 28. ~ ’13. 10. 31.

마. 계약금액 : 145,255,000원(4차분 35,445,800원)

※ 계약금액 : 변경없음

바. 예산과목 : 건설중인자산, 수서배수지건설공사, 시설비 등(시설비)

사. 계 약 자 : ㈜조광환경산업개발 대표 조만기

아. 준공기한 연기

《전체》

- 당초 : 2011. 7. 29 ～ 2013. 10. 31

- 변경 : 2011. 7. 29 ～ 2013. 12. 31 (증61일)

《4차분》

- 당초 : 2013. 7. 28 ～ 2013. 10. 31

- 변경 : 2013. 7. 28 ～ 2013. 12. 31 (증61일)

자. 준공기한 연기 사유

- 수서배수지 건설공사의 준공기한 연장으로 인한 폐기물처리용역의 전체 및 4차분 준공기한 연기

붙 임 : 1. 준공기한 연기 계획서 1부.

2. 설계변경 설명서 1부.

3. 합의서 각 1부.  끝.

주무관	이경훈		시설과장	박기범		급수부장	이상홍		상수도사업본부부본부장	전결 10/29 김준기
협조자	주무관	문병기		주무관	김종필		재무회계과장	채규평
기획예산과장	조세연
시행	시설과-7060	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1454	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개