문서번호	시설관리과-27029
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
장준원	문용욱	이자원	12/24 代이만섭

『2014년 자동제어설비 유지관리 용역』

2014년(금차) 용역금액 변경 보고

2014. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

작 성 자	과장 : 이자원☎3146-3990 팀장 : 문용욱☎4015 담당 : 장준원☎4016

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『2014년 자동제어설비 유지관리 용역』

2014년(금차) 용역금액 변경 보고

『2014년 자동제어설비 유지관리 용역』 에 대한 차수별 용역 금액을 변경코자 아래와 같이 보고 드림.

용역현황

용 역 명	2014년 자동제어설비 유지관리 용역
용 역 기 간	2014. 04. 01 ~ 2015. 03. 31.
용역금액(원)	총차	2014년(금차)	2015년(2차)
	32,195,510	24,146,434	8,049,076
용 역 회 사	㈜이피에스솔루션
대 표 자	공 민 근

※ 점검주기 : 각 시설물별 분기 1회 점검

금회(3차) 정산 금액 : 금8,044,850원(금팔백사만사천팔백오십원정)

계약금액	정 산 금 액			정산 후 잔액	비 고
	합 계	기 정산액	금회 정산액
32,195,510	24,134,550	16,089,700	8,044,850	8,060,960

차수별 용역금액 변경

용역금액 변경 사유

- 용역 물량의 변경은 없으나, 차수별 계약 금액의 변동으로 인한 2014년(금차) 용역금액 조정

용역금액 변동내역

구 분	용역기간	용 역 금 액(원)		증 · 감
		당 초	변경
총차	‘14.04.01~’15.03.31	32,195,510	32,195,510		-
2014년(금차)	‘14.04.01~’14.12.31	24,146,434	24,134,550	감	11,884
2015년(2차)	‘15.01.01~’15.03.31	8,049,076	8,060,960	증	11,884

향후계획

자동제어설비 용역의 원할한 업무 추진을 위하여 2014년(금차) 차수별 용역금액 변경을 시행코자 합니다.

따로붙임 : 1. 변경 계약내역서 1부.

2. 합의서1부. 끝.

작 성 자	과장 : 이자원☎3146-3990 팀장 : 문용욱☎4015 담당 : 장준원☎4016