시의원 요구 자료 제출

시 행	방재안전시설부-1954	(		)
접 수		(		)
결재일자	2013.10.29.
공개여부	대시민공개
수 신 자	건설총괄부장

★주무관	치수시설과장	방재안전시설부장	시설국장		결재
최연섭	서관석	박종웅	10/29 이광세
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 177번, 김진영의원, 건설위원회)

붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김진영 의원(건설위원회, 새누리당)

177. 용허리 빗물저류조 설치공사 관련

(1) 사업개요[목적,위치,규모,사업기간,총사업비,공정율(계획공정,현재공정,계획대비실공정율)]

(2) 연도별 예산편성 및 집행내역(항목별)

(3) 사업설명회 개최('13.1.17) 결과(참석자,설명회 주요 내용 및 주민요구 사항)

(4) 유입관로 시점부 지장물 현황(지장물 종류,규모,관리기관)

(5) (4)항의 지장물과 관련하여 유관기관과의 협의내용

(6) 기본 및 실시설계용역 현황

1)용역업체명

2)용역기간

3)용역비

(7) 기본 및 실시설계시 지장물을 발견하지 못한 이유

(8) 지장물 해결방안

□ 용허리 빗물저류조 설치공사 관련 자료는 다음과 같습니다.

붙임 : 용허리 빗물저류조 설치공사 자료 1부. 끝

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (방재안전시설부)	담당사무관	서 관 석
	☎3708-8773	주 무 관	류 용 열
	작 성 일 : 2013. 10.

용허리 빗물저류조 설치공사

(1) 사업개요

○ 사업목적 : 기존 서초빗물펌프장 용량부족 및 유입, 유출관거 통수능 부족 등으로 인하여 집중호우시 강남역, 진흥아파트 일대 침수가 자주 발생하고 있어 용허리 공원 내부에 빗물저류조를 신설하여 지역주민의 재산 및 인명   피해를 예방코자 함.

○  사업위치 : 서초구 서초동 1324-1번지 일대(용허리 근린공원)

○  규    모 : 빗물저류조 15,000㎥, 유입관로 설치 237m(2.0×1.5@1)

○  사업기간 : 2012. 12 ∼ 2013. 12

○  총사업비 : 9,500백만원

○  공 정 율 : 계획공정 82.7%, 현재공정 82.1%, 계획대비 실공정율 99.3%

(2) 연도별 예산편성 및 집행내역(항목별)

○ 연도별 예산편성

구분	계	기투자	2012	2013
계	9,500	-	2,794	6,706
시설비	9,500	-	2,794	6,706
감리비	-	-		-

○ 집행내역

구분	계	기투자	2012	2013
계	4,754	-	-	4,754
시설비	4,754	-	-	4,754
감리비	-	-	-

(3) 사업설명회 개최('13.1.17) 결과(참석자,설명회 주요 내용 및 주민요구 사항)

○ 일  시 : 2013.01.17.(목) 09:00 ~ 10:30

○ 장  소 : 서초구청 5층 회의실

○ 참석자

- 서초구청 : 구청장, 부구청장, 각 국장, 관련과(동)장, 주민대표

- 도시기반시설본부 : 토목부장, 터널건설과장, 담당 주무관

- 용역사 : (주)한국종합기술 상하수도부 박권식 차장

○ 주요 설명내용

- 사업개요 및 추진일정

- 우기전 주요구조물공사 완료를 위한 서초구청의 관련 인·허가 신속처리 협조요청

(도시계획시설 결정, 도로점용 허가, 공사중교통소통대책 심의, 공원폐쇄)

○ 서초구청 의견 및 요구사항

- 저류조 조기 완료를 위해 관련인·허가 등 적극 협조

- 공사완료 후 공원복구 시 구와 협의를 거쳐 최신시설로 조성

- 공사 중 교통통제 최소화 당부

- 기존 박스 측면에 월류웨어를 설치하는 바 강우 시 저류에 지장이 없도록

유입수로의 정밀 시공 및 검토

(4) 유입관로 시점부 지장물 현황(지장물 종류,규모,관리기관)

연번	지장물 종류	규모(mm)	관리기관	비고
1	한전	D100×3공 D200×14공	한국전력 강남지사
2	통신	D100×14공	LG파워콤	통신구BOX 2.2×2.3m
		D100×20공 D50×3공	KT서초지사
		D100×5공	SK브로드밴드
3	도시가스	D300×1공	대한도시가스
4	상수도	D150×1공 D200×1공	강남수도사업소

(5) (4)항의 지장물과 관련하여 유관기관과의 협의내용

○ 지장물 이설 관련 유관기관 합동회의(‘13.03.06)

○ 지장물 관련 유관기관 입회 시험굴착(‘13.03.09)

○ 지장물 이설요청 (‘13.03.13)

○ 지장물 이설요청 (‘13.05.09)

(6) 기본 및 실시설계용역 현황

※ 도시안전실 하천관리과 소관이며 하천관리과의 협조를 얻어 제출합니다.

○용역업체명 : 현대엔지니어링(주), ㈜한국종합기술, ㈜한국종합엔지니링

○용역기간 : ‘11.03.30~’12.10.31

○용역비 : 973,907,880원

(7) 기본 및 실시설계시 지장물을 발견하지 못한 이유

※ 도시안전실 하천관리과 소관이며 하천관리과의 협조를 얻어 제출합니다.

○ 설계 과정에서 지하매설물시스템을 통해 지장물 조사를 실시하였으나,

미등록된 매설물 발생

(8) 지장물 해결방안

○ 지장물 저촉으로 인한 유입관거 시공이 불가능하여 대안검토 등에 대하여 사업주관부서(하천관리과)와 협의진행 중임.  끝.