함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경 시행〔2014년 중부수도사업소 전기시설물 유지보수 2차공사〕

우리사업소에서 시행중인 「2014년 중부수도사업소 전기시설물 유지보수 2차공사(장기계속단가계약)」 건에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 차수별 금액변경을 시행코자 합니다.

가. 계약건명 : 2014년 중부수도사업소 전기시설물 유지보수 2차공사

(장기계속단가계약)

나. 계약업체 : ㈜남해전기 *********

다. 계약기간 : 2014.10.28. ~ 2014.12.31.

(총부기기간 2014.10.28. ~ 2015.4.30.)

라. 설계변경 내용 : 물량 증감 및 신공종 발생

마. 설계변경 내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증․감액(원)	비 고
총부기금액	65,532,227	65,532,227	-	총부기금액 변동없이 금차계약금액 감액
금차(1차)계약금액	55,000,000	40,232,232	(감)14,767,768

바. 차수별 계약금액 변경사유 : 물량 증감 및 신공종 발생 등으로 금차계약금액 변경으로 인한 차수별 계약금액 변경(총부기금액은 변동 없음)

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙 임 : 1. 2014년 중부수도사업소 전기시설물 유지보수 2차공사 감독보고 1부

2. 설계변경 내역서(총괄내역서 및 견적서) 각1부.

3. 합의서 1부.  끝

★주무관	황필권		기전팀장	손병희		주무관	선미애		시설관리과장	나태산
중부수도사업소장	12/26 안운길
협조자	주무관	은정호
시행	시설관리과-34785	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2227	/전송	02-3146-2239	/		/	부분공개(6)