문서번호	수질연구과-7698
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		수질연구과장		수질분석부장
박창민		이종규		12/26 김복순
협 조
	주무관				김수현

2014년 세출예산 사고이월 대상사업 보고

2014. 12.

서울특별시상수도연구원

(수질연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 세출예산 사고이월 대상사업 보고

『실험실정보관리시스템(LIMS)고도화』시행과 관련 사전절차 지연 및 유찰로 계약시기가 늦춰져 사업의 정상적인 완결을 위해 사고이월 조치하고자 함

Ⅰ		사고이월 사업현황

□ 사 업 명 : 실험실정보관리시스템(LIMS) 고도화

□ 사 업 비 : 202,000천원

□ 사업기간 : ’14. 10 〜 ’15. 3.(6개월)

□ 사고이월 사업현황

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 연구개발비, 전산개발비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분	지출원인 행위액	지 출 액	사고이월액
218,020	’14. 6. 9	218,020	계	202,000	141,400	60,600
			LIMS 고도화	202,000	141,400	60,600

○ 이월사유 : 각종 심사 등 사전절차 지연 및 유찰에 따른 계약 지연

□ 사업내용

○ 실험실정보관리시스템(LIMS) 프레임 워크 변경

○ 시스템 전체 소스 재구축(패키지 소프트웨어 커스터마이징)

○ 기초데이타관리시스템(RDMS) 설치(라이선스 도입)

Ⅱ		사고이월 사유

□ 사업 지연 사유

○ 사업계획 수립 이후, 예산타당성 심사 및 중복성 심사, 보안성 검토 등 제반 사전절차의 이행에 따른 지연

○ 입찰공고 후 유찰(2회)에 따른 계약 지연

□ 사업추진 경과

○ 사업계획 본부장 방침(’14. 4. 15)

○ 정보화사업 예산타당성 심사 요청(’14. 4. 22, 정보기획담당관)

- 예산타당성 심사결과 통보(’14. 5. 8)

○ 정보화사업 중복성 검토 요청(’14. 4. 22. 안전행정부)

- 사전협의 검토결과 통보(’14. 5. 16)

○ 예산확보계획 본부장 방침(’14. 5. 27)

○ 제안요청서 검토 요청(’14. 6. 25, 정보기획담당관)

- 제안요청서 검토결과 통보(’14. 7. 2)

○ 정보화사업 보안성 검토 요청(’14. 6. 26, 정보통신보안담당관)

- 보안성 검토결과 통보(’14. 7. 24)

○ 제안요청서 사전공개(’14. 7. 29)

○ 계약 심사 요청(’14. 7. 29, 계약심사과)

- 심사결과 통보(’14. 8. 1)

○ 발주시행(계약의뢰)(’14. 8. 12)

○ 수의계약의뢰(’14. 9. 26)

○ 계약(’14. 9. 30)

Ⅲ		향후계획

□ ‘15. 2월 : 시스템 시운전 개시

□ ‘15. 3월 : 고도화 완료(검사)