의원 요구 자료 제출

시 행	건축부-11168
결재일자	2013.10.29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		의료시설과장	건축부장	시설국장		결재
전재진		차재옥	안재혁	전결 10/29 이광세
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 78번 박태규 의원, 118번 이명영 의원, 145번 인택환 의원, 건설위원회)

2013. 10

도시기반시설본부

(건 축 부)

박태규 의원(건설위원회, 새누리당)

78. 장충체육관 리모델링공사 관련

(1) 사업개요[목적,위치,규모,사업기간,총사업비(항목별구분),공정율

(계획,현재,계획대비 실공정율)]

(2) 연도별 예산편성 및 집행실적

(3) ‘13년도 예산편성액 중 현재까지의 현잔액 및 예산집행 계획, 예산집행 부진 사유(구체적으로 작성)

(4) 현재 추진 중인 공종

□ 사업개요

○ 목 적

- 노후된 시설의 역사성을 보전하면서 스포츠와 문화가 함께하는 문화복합공간으로 리모델링하여 시민들이 도심에서도 고품격의 문화와 체육활동을 즐길 수 있도록 함

○ 위 치 : 서울시 중구 장충동2가 200-102

○ 규 모 : 지하2층, 지상 3층, 총면적 11,429㎡

○ 사업기간 : 2012.05.30 ~ 2014.06.02

○ 총사업비 : 298억원

○ 공정율

구분	계 획	현 재	계획대비 실 공정율	비 고
공정율	45%	43%	95.55%	3층 스탠드 골조공사

□  연도별 예산편성 및 집행실적

○ 연도별 예산편성

(단위 : 백만원)

구분	사업비	2011이전	2012년	2013년	2014년 이후
계	29,880	1,454	15,100	13,326	-
시설비	28,611	1,454	14,380	12,777
감리비	1,055		660	395
시설부대비	214		60	154

○ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	예산	계약금액	집행금액	집행세부내역	비고
계	29,880	19,981	10,648
2011년 이전	1,454	1,366	1,366	설계비등 : 1,059 설계감리 : 88 폐기물 : 219
2012년	15,100	15,100	9,023	건축공사비 : 6,945 설비공사비 : 1,416 감리비 : 660 시설부대비 : 6
2013년	13,326	3,515	259	설비공사비 : 75 감리비 : 179 시설부대비 : 5

□  ‘13년도 예산편성액 중 현재까지의 현잔액 및 예산집행 계획, 예산집행 부진 사유

○ 2013년도 예산, 계약금액, 잔액 및 집행부진 사유

(단위 : 백만원)

구 분	예산	계약금액	집행금액	집행잔액	집행부진 사유
계	13,326	3,515	259	3,256
공사비	12,777	3,147	75	3,072	지급시기 미도래
감리비	395	363	179	184	기성미청구
시설부대비	124	5	5	0

□ 현재 추진 중인 공종

○ 3층 스탠드부분 골조공사 진행 및 지하층 마감공사. 끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (건축부)	담당사무관	차재옥
	☎ 3708-2618	담 당 자	신현성
	작 성 일 : 2013. 10.

이명영 의원(건설위원회, 새누리당)

118. 장충체육관 리모델링공사 관련

- 정밀안전진단 실시결과에 따른 슬래브, 보, 기둥, 트러스 부분에 대한

보수보강 시행 여부 및 보수보강 시행부분은 보수보강 방법과 보수

보강 근거 자료

□  정밀안전진단 실시결과에 따른 슬래브, 보, 기둥, 트러스 부분에 대한 보수보강 시행 여부 보수보강 시행부분은 보수보강 방법과 보수 보강 근거 자료

구분	시행부분 사진	보수보강 방법	근거자료
슬래브		유리섬유 보강판	구조검토서
보		유리섬유 보강판	구조검토서
		철재보강판
기둥		콘크리트 단면보강 (시공전)	구조검토서
		콘크리트 단면보강 (시공후)
트러스	-	신설

끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (건축부)	담당사무관	차재옥
	☎ 3708-2618	담 당 자	신현성
	작 성 일 : 2013. 10.

인택환 의원(건설위원회, 새누리당)

145. 장충체육관 리모델링공사 관련

(1) 연도별 예산편성 및 집행실적

(2)차수별 설계변경 세부내역(예산변동 사항 포함)

(3)적용된 각종 공법에 대한 선정방법 선정결과

(4)관련민원 조치내용

□  연도별 예산편성 및 집행실적

○ 연도별 예산편성

(단위 : 백만원)

구분	사업비	2011이전	2012년	2013년	2014년 이후
계	29,880	1,454	15,100	13,326	-
시설비	28,611	1,454	14,380	12,777
감리비	1,055		660	395
시설부대비	214		60	154

○ 연도별 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	예산	계약금액	집행금액	집행세부내역	비고
계	29,880	19,981	10,648
2011년 이전	1,454	1,366	1,366	설계비등 : 1,059 설계감리 : 88 폐기물 : 219
2012년	15,100	15,100	9,023	건축공사비 : 6,945 설비공사비 : 1,416 감리비 : 660 시설부대비 : 6
2013년	13,326	3,515	259	설비공사비 : 75 감리비 : 179 시설부대비 : 5

□ 차수별 설계변경 세부내역

○ 1차 계약변경(설계변경 및 내역조정)

공종	당초금액(a)	변경금액(b)	증액(b-a)	비고
건축공사	3,798,906,869	4,296,786,382	497,879,513
토목공사	1,580,703,654	1,642,249,833	61,546,179
간접비	1,023,473,113	876,603,785	-146,869,328
폐유처리비	-	19,962,727	19,962,727
부가세	640,308,364	683,560,273	43,251,909
합 계	7,043,392,000	7,519,163,000	475,771,000

○ 설계변경 사유

- 굴뚝철거 관련 철거공법 변경

- 동대입구역 5번 출입구 철거

- 유류저장시설 및 공중화장실 구조물 철거

- 지하탱크 준설 및 폐유처리 등

□ 적용된 각종 공법에 대한 선정방법 선정결과

○ 적용된 공법(신기술 적용)

신기술명	지정번호	지정일	보호기간	보호여부
도막재,보강재 및 아스팔트 일체형 방수재와 연결부를 2중 접합구조로 하는 복합 방수공법	476	2005.12.13	9년	신기술
경량 보수모르타르와 통기성 경량 복합 보강 판넬을 이용한 콘크리트 구조물의 보수보강공법	596	2009.12.10	5년	신기술

○ 선정사유 : 예산절감을 위해 설계용역 시 신기술을 검토하도록 과업내용 반영

□  관련민원 조치내용

○ 별도 특이사항 없음

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (건축부)	담당사무관	차재옥
	☎ 3708-2618	담 당 자	신현성
	작 성 일 : 2013. 10.

이곳에 본문을 입력하세요