의원 요구 자료 제출

시 행	건축부-11201
결재일자	2013.10.29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		공공시설관리과장	건축부장	시설국장		결재
전성민		신추교	안재혁	10/29 이광세
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 148번, 인택환의원, 건설위원회)

시의회 행정사무감사 요구자료에 대하여 아래와 같이 제출하고자 합니다.

가. 자료 요구내용

○ 요구번호 148번.

동대문역사문화공원 건설공사 관련(전체 사업기간)

(1)연도별 예산액 대비 집행액

(2)연도별 공사 및 용역의 모든 발주건별 다음 사항
(연도/발주건명/사업기관/발주금액/낙찰금액/계약금액/계약일자/낙찰자/비고)

(3)연도별 공사 및 용역의 설계변경 내역
(연도/사업명/예산액/사업기간/사업비/설계변경일자/설계변경내용/증감액/최종사업비/비고)

나. 제출내용 : “따로붙임 자료”

다. 제출방법 :  건설총괄부에서 일괄제출

따로붙임 :      인택환 시의원 요구자료 1부.  끝.

인택환 의원(건설위원회, 민주당)

148. 동대문역사문화공원 건설공사 관련(전체 사업기간)

(1)연도별 예산액 대비 집행액

(2)연도별 공사 및 용역의 모든 발주건별 다음 사항(연도/발주건명/사업기관/발주금액/낙찰금액/계약금액/계약일자/낙찰자/비고)

(3)연도별 공사 및 용역의 설계변경 내역(연도/사업명/예산액/사업기간/사업비/설계변경일자/설계변경내용/증감액/최종사업비/비고)

(1)연도별 예산액 대비 집행액(`13.9월말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		계	2006~ 2009	2010	2011	2012	2013	비 고
예산액	계	421,222	134,134	72,367	74,063	72,200	68,458
	설 계 비	16,830	16,830	-	-	-	-
	시 설 비	388,969	112,880	68,027	71,288	70,259	66,515
	감 리 비	14,270	3,981	4,226	2,557	1,721	1,785
	시설부대비	1,153	443	114	218	220	158
집행액		361,205	134,134	72,367	74,063	71,781	8,860

(2)연도별 공사 및 용역의 모든 발주건별 다음 사항
(연도/발주건명/사업기관/발주금액/낙찰금액/계약금액/계약일자/낙찰자/비고)

1) 연도별 공사 발주 현황

(단위 : 백만원)

연도	발주건명	사업기간	발주금액	계약금액		계약일자	낙찰자	비고
				최 초	현 재
2008	동대문디자인 플라자파크건설 토공사	‘08.09.10 ~‘09.06.30	9,181	7,917	8,732	`08.09.05	황보건설 외 1개사
2008	DDP홍보관 건립공사	‘08.12.31 ~‘09.05.14	3,187	3,165	3,363	`08.12.31	동부건설 (주)
2009	동대문디자인 플라자파크 건설공사	‘09.03.31 ~‘13.11.30	299,079	224,015	282,776	`09.03.30	삼성물산(주) 외 2개사
2009	동대문디자인 플라자파크건설 전기공사	‘09.03.31 ~‘13.11.30	29,500	23,477	25,784	`09.03.25	삼성엔지니어링(주)
2009	동대문디자인 플라자파크건설 정보통신공사	‘09.02.26 ~‘13.11.30	5,730	4,926	6,404	`09.02.20	테라텔레콤 (주)
2009	동대문디자인 플라자파크건설 지열설비공사	‘09.03.05 ~‘11.12.30	1,179	1,024	1,014	`09.02.27	(주)조은 에너지
2009	동대문디자인 플라자파크건설 서울성곽정비 복원공사	‘09.04.02 ~‘09.09.30	2,687	2,352	2,489	`09.03.30	(주)예진 건설

2) 연도별 용역 발주 현황

(단위 : 백만원)

연도	발주건명	사업기간	발주금액	계약금액		계약일자	낙찰자	비고
				최 초	현 재
2006	동대문운동장 부지 지표조사	‘06.09.12 ~‘06.10.11	17	16	16	-	(재)한강 문화재연구원	-
2007	동대문디자인 파크 설계용역	‘07.12.27 ~‘09.05.30	(7,900)	13,660	16,830	증 3,170	(주)삼우 종합건축, ZAHA HADID LTD	협상
2007	동대문운동장 시굴조사	‘07.12.28 ~‘08.07.31	235	224	224	-	(재)중원 문화재연구원	-
2008	동대문디자인파크 건설사업관리용역	‘08.04.21 ~‘13.10.20	8,146	6,250	13,454	증 7,204	(주)건원 엔지니어링외 2개사	-
2008	동대문디자인 플라자파크 건설공사 교통영향평가용역	‘08.03.10 ~‘09.06.30	183	159	158	감 1	대현이엔씨 (주)	-
2008	동대문운동장 문화재발굴조사	‘08.06.18 ~‘09.07.31	497	477	7,025	증 6,548	(재)중원 문화재연구원	-
2009	동대문디자인 파크건설공사 폐기물 처리용역	‘09.02.25 ~‘11.12.31	1,126	960	960	-	삼환환경(주)	-
2010	동대문디자인 파크건설공사 지정폐기물(석면)운반처리용역	‘10.06.07 ~'10.07.06	3	3	3	-	(주)이에스티 외 3개사	-
2010	동대문디자인 파크건설공사 건설폐기물 처리용역	‘10.03.08 ~‘13.08.31	240	208	208	-	(주)진흥 중공업 외 1개사	-
2012	동대문디자인 파크건설공사 건설폐기물 처리용역 추가발주분	‘12.09.28 ~‘13.11.30	15	15	15	-	(주)일성제이에스 외 1개사	-

(3)연도별 공사 및 용역의 설계변경 내역
(연도/사업명/예산액/사업기간/사업비/설계변경일자/설계변경내용/증감액/최종사업비/비고)

(단위 : 백만원)

연도	사업명	예산액 (최초발주액)	사업기간	사업비 (최초)	설계변경 일자	설계변경내용	증감액	최종사업비	비고
연도별 공사 설계변경 내역
2008	동대문디자인플라자파크 건설 토공사	9,181	‘08.09.10 ~‘09.06.30	7,917	‘08.12.24	노점상이전에 따른 노점상가판대, 용역비 등	증 434	8,531
					'09.02.18	지하상가 출입구 철거 및 보도조성 등	증 512	8,863
					‘09.06.30	물량증가	감 131	8,732
2008	DDP홍보관 건립공사	3,187	‘08.12.31 ~‘09.05.14	3,165	'09.05.14	외부계단 신설, 외장변경, 전시기획 변경 등	증 238	3,403
					'09.05.28	제경비 정산	감 40	3,363
2009	동대문디자인 플라자파크 건설공사	299,079	‘09.03.31 ~‘13.07.31	224,015	'09.12.15	공원부분 재설계 등	증 22,640	246,655
					'10.04.20	편의 및 유지관리 시설 확충, 공원주변환경정비 등	증 1,260	247,915
					'10.09.08	물가변동으로 인한 계약금액 조정, 추가공사 발생 등	증 9,011	256,926
					'10.11.26	추가공사 발생, 주변 환경정비 등	증 1,570	258,496
					'11.05.30	물가변동으로 인한 계약금액 조정, 추가공사발생 등	증 6,393	264,889
					'11.11.29	추가공사 발생, 주변 환경정비 등	증 2,539	267,428
					`12.09.27	운영부서 요구 반영, 물가변동 등	증 2,919	270,347
					`12.12.27	운영부서 요구 반영, 설계보완 등	증 3,248	273,595
					`13.04.22	운영부서 요구 반영, 설계보완 등	감 15	273,580
					`13.07.26	운영부서 요구 반영	증 9,196	282,776
2009	동대문디자인 플라자파크건설 전기공사	29,500	‘09.03.31 ~‘13.07.31	23,477	‘09.12.16	사업계획 변경 (공원부분 재설계 등)	증 687	24,164
					‘10.09.14	물가변동으로 인한 계약금액 조정, 추가 공사 발생 등	증 1,003	25,167
					‘11.09.28	물가변동으로 인한 계약금액 조정, 운영기관 요청 의한 물량증감	증 485	25,652
					`13.01.09	물가변동 반영, 운영부서 요청 반영	증 203	25,855
					`13.05.29	운영부서 요구 반영	감 71	25,784
2009	동대문디자인플라자파크건설 정보통신공사	5,730	‘09.02.26 ~‘13.07.31	4,926	'09.12.15	문화재 이전 복원에 따른 공원부분 재설계	증 403	5,329
					'10.03.29	1차공사 준공 정산	감 12	5,317
					'10.08.25	물가변동으로 인한 계약금액 조정	증 150	5,467
					'10.12.22	물량변경 (케이블트레이 증가)	증 85	5,552
					'11.08.30	DDP 공간 프로그램 변경사항 반영	증 839	6,391
					'12.08.10	지하공간개발공간조정으로인한 물량변경	증 14	6,405
2009	동대문디자인 플라자파크건설 지열설비공사	1,179	‘09.03.05 ~‘11.12.30	1,024	'09.10.06	공원부분 재설계에 따른 장비 및 배관조정	감 1	1,023
					'09.10.15	1차공사 준공에 따른 법정경비 정산감액	감 9	1,014
2009	서울성곽 정비복원 공사	2,687	‘09.04.02 ~‘09.09.30	2,352	'09.08.13	공원부분 재설계에 따른 과업변경, 정산감액	증 216	2,568
					'09.10.12	법정경비 정산감액	감 79	2,489
연도별 용역 설계변경 내역 (단위 : 백만원)
연도	사업명	예산액 (최초발주액)	사업기간	사업비 (최초)	설계변경일자	설계변경내용	증감액	최종사업비	비고
2007	동대문디자인 파크건설공사 설계용역	(7,900)	‘07.12.27 ~‘09.05.30	13,660	'08.10.16	설계규모증가 및 과업변경	증 1,910	15,570
					'08.12.22	성곽복원안의 설계변경을 위한 설계용역 기간 연장	-	15,570
					'09.02.27	공원부분 재설계 등 과업추가	증 1,260	16,830
2008	동대문디자인 파크건설공사 건설사업 관리용역	8,146	‘08.04.21 ~‘13.10.20	6,250	'09.11.10	감리규모 증가 및 과업변경	증 1,150	7,400
					'10.03.23	CA용역 추가	증 1,940	9,340
					'10.07.05	물가변동 따른 용역금액 변동	증 325	9,665
					'10.09.15	교통소통대책 수립용역 추가	증 30	9,695
					'11.04.18	계약기간 연장 및 과업 추가	증 1,795	11,490
					'12.02.16	계약기간 연장 및 과업 추가	증 64	11,554
					'12.08.01	계약기간 연장 및 과업 추가	증 1,900	13,453
					`13.02.05	CA용역 배치 축소 교통처리대책용역 추가	감 92	13,361
					`13.10.21	공기연장에 따른 용역기간 연장, 추과과업 반영	증 213	13,574
2008	동대문디자인 플라자파크 건설공사 교통영향평가	183	‘08.03.10 ~‘09.06.30	159	'09.06.17	미사용 자문비 감액	감 1	158
2008	동대문운동장 문화재발굴 조사용역	497	‘08.06.18 ~‘09.07.31	477	'08.08.19	성곽유구 확인으로 확장 발굴 등	증 1,107	1,584
					'08.10.24	하도감터 이전 보전 및 성곽 추가조사	증 3,420	5,004
					'09.02.25	문화재 추가 연장발굴	증 978	5,982
					'09.04.18	하도감터 유구 해체이전 등	증 1,962	7,944
					'09.07.31	준공 정산 감액	감 919	7,025
2009	동대문디자인 파크건설공사 폐기물 처리	1,126	‘09.02.25 ~‘11.12.31	960	'13.04.24	현장여건 반영에 따른 물량증가	증 242	1,202

끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (건축부)	담당사무관	신추교
	☎3708-2422	담 당 자	전성민
	작 성 일 : 2013. 10.