문서번호	설비부-14844
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이동기	이달영	12/26 박기형

『경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사(1차,2차)』

준공기한 연기 및 설계변경요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  12.

『경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사(1,2차)』

준공기한 연기 및 설계변경요청 검토보고

『경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사(1,2차)』관련 책임감리원으로부터 선행 토목·조경공사 지연으로 인한 통신공사 준공기한 연기 및 설계변경요청에 대한 검토 보고임.

공사개요

❍ 공사명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사

❍ 위  치 : 노원구 공릉동 공덕제2철도 건널목~육사삼거리

❍ 규  모

- 통신시설 : CCTV카메라 15대, 스피커 34대

- 통신공사 : 방송 및 영상 배관·배선

❍ 공사기간 : 총차 13.10.10 ~ 15.01.09.

1차  13.10.10 ~ 15.01.09.

2차  14.11.28 ~ 15.01.09.

❍ 총사업비   총차 225,073,000원

1차 200,000,000원

2차 25,073,000원

❍ 시공사 : 아산정보통신(주), 대표 홍수길

❍ 감리사 : 유신(주)

관련근거

❍ 준공기한 연장 검토보고 및 설계변경 요청- 감리단

- 경의경춘(감) 제2014-1008(2014.12.23)

- 경의경춘(감)  제2014-1023(2014.12.24.)

감리단 검토의견

❍ 설계변경 사유

- 현장여건에 따른 변경

관로터파기 일부 “ 전기공사 터파기와 공동”변경.

- 설치여건 부적합으로 규격변경

맨홀 800*800*800을 -> 600*600*600으로변경

- 선로 공사와 장비공사와의 분계점을 정하고,

향후 CCTV를 노원구 자가망에 연결하기 위한 작업 추가

❍ 연기사유

“경춘선 폐선부지 공원조성공사” 선행 공정인 토목/조경공사가 지연되고

있어 후속 공정인 통신공사 추진이 불가함에 따라 토목/조경공사에 맞추어

공사기간을 연장하여 공사를 추진 하고자 함.

❍ 준공(납품)기한 연기 및 설계변경

구 분		당초	변경	비고
공사 기간	총차	‘2015.01.09	‘2015.02.15	증)37일
	1차	‘2015.01.09	‘2015.02.15	증)37일
	2차	‘2015.01.09	‘2015.02.15	증)37일
공사 금액
	총차	225,073,000원	235,377,000원	증)10,304,000
	1차	200,000,000원	210,304,000원	증)10,304,000
	2차	25,073,000원	25,073,000원	변동없음

❍ 지체지상급 부과여부 : 미부과

검토의견

❍ 감리단의 검토의견과 같이 선행공정 일정에 맞추어 원활한 공사가 추진될 수 있도록 준공기한 연기하고, 설계변경 타당성 및 내역서 검토가 적합한 것으로 판단되어 건설총괄부로 계약변경의뢰 요청하고자 함.

따로붙임 : 준공(납품)기한 연기 및 설계변경 요청 보고서.  각 1부.   끝.