문서번호	하천관리과-20162
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하천관리과장	물관리정책관
이병우		김용학	12/26 김학진
협조
	청계천관리팀장		김석권

“수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역” 설계변경 및 준공기한 연기 보고

2014. 12.   .

도시안전실

(하천관리과)

“수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역”

설계변경 및 준공기한 연기보고

수표교길 연결 주변정비방안 타당성조사 및 기본계획 용역의 과업추가 등에 따른 설계변경 및 준공기한 연기 보고임.

용역 개요

용 역 명 : 수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획용역

도 급 자 : ㈜한일이엔씨 대표 손흥일, ㈜상명종합건축사 대표 손동준

계약기간 : ‘14. 6. 30 ~ ’15. 2. 24

계약금액 : 일억칠천이십일만일천구백원정(￦170,211,900)

설계변경 내용

계약금액 변경 : 측량과업 추가 및 자문비 증액에 따른 계약금액 조정

- 관계부서 회의시 수표교 복원계획(청계천로 확폭 및 조성계획, 지하    통수단면 확보 등) 확정을 위한 측량실시(붙임 회의결과 공문참조)

- 분야별 전문가 자문비 증가(당초 3인 2회, 변경 6인 2회)

설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
인건비	40,035,934	44,681,469	4,645,535	측량비(증)
경 비	56,243,477	57,027,427	783,950	자문비(증)
제잡비	58,458,679	65,341,104	6,882,425	손배공제료포함
계	154,738,090	167,050,000	12,311,910
부가세	15,473,810	16,626,000	1,152,190
도급액	170,211,900	183,676,000	증)13,464,100

예산 확보

별도 예산확보는 불가하므로 청계천 개선보완 사업 낙찰차액 일부사용

- 예산과목 : 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 청계천 개선보완

사업(100-401-10), 시설비

준공기한 연기 검토

연기사유 : 절대공기 부족

- 청계천시민위원회의 수표교 중건 방향 추가 논의 약3개월 필요

- 타당성조사 용역에 대한 서울연구원(공공투자센터)의 검증기간

약3개월 필요.

준공연기 : 당초 2015. 2. 24 ⇒ 연기 2015. 6. 30

조치 계획

상기 사항에 대해 설계변경(증액)을 시행하고, 준공기한을 2015년   6월 30까지 연기코자 함.

따로붙임 : 1) 관련 공문 1부

2) 설계변경 내역서 1부.

3)  준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.