문서번호	시설보수과-9228
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		정재현	12/26 이승진
협조

미집행 예산 활용계획 보고

(화랑고가 방음벽 추가설치공사)

2014. 12.

북부도로사업소

시설보수과

미집행 예산 활용계획 보고

(화랑고가 방음벽 추가설치공사)

화랑고가 방음벽 추가설치공사 시행에 따른 교통안전요원 및 안전

시설 추가설치 등을 위해 미집행액을 활용코자 함.

관련근거

지방자치단체 세출예산 집행기준(안전행정부 예규 제65호, 2014.1.1)

- Ⅲ. 비목별 세부집행지침 13-1. 시설비(401-01): 동일 편성목 내의 낙찰차액 집행가능

공사개요

계약건명 : 화랑고가 방음벽 추가설치공사

계약금액 : 103,356,000원

공사기간 : 2014. 12. 9 ∼ 2015. 2. 28

계 약 자 : ㈜ 미륭산업

미집행 예산(낙찰차액 및 이설비) 사용계획 : 16,644,000원

교통안전요원 추가배치에 따른 인건비 증가

- 경찰서지정 모범택시기사 안내요원 배치

교통안전 시설물 추가설치

- 공사안내 및 교통통제안내 시설물 추가 설치

기타 추가시설 설치 등

조치의견

추가 소요되는 공사금액은 현재 시행중인 공사의 낙찰차액(11,484,000원) 및 이설비(5,160,000원)를 활용 집행 후 추후 설계변경시 반영처리 .끝.