문서번호	시설보수과-5040
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		동부도로사업소장
이민호	김호규	박용선		12/26 송상영
협 조

준공기한 연기보고(성내교보수공사)

2014.  12

동 부 도 로 사 업 소

도 로 보 수 과

준공기한 연기 보고

(성 내 교 보 수 공 사)

우리사업소에 시행하고 있는 『성내교보수공사』와 관련, 기온급하강에 따른 동절기 품질확보 어려움으로 인한 절대공기 부족으로 준공기한을 연기코자 함.

『관련근거 : 동절기 공사중지 검토보고(공사감독1처-14205호(2014.12.23.))』

	1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 성내교보수공사

○ 공사기간 : 2014. 10 .31 ~ 2014. 12. 31

○ 공 사 비 : 총공사비 439,479천원(도급비332,604천원, 관급비 107,145천원)

○ 공사개요 : 받침교체 90개소, 표면보수 A=162㎡, 단면보수 A=126㎡

○ 도 급 자 : ㈜선우씨앤드에이건설 대표 정 우 금

	2		연 기 사 유

○ 상기공사 추진 중 시설관리공단으로부터 기온급강하로(12월 평균최저기온 –7.5℃)       동절기 공사 품질확보 어려움과 근로자의 안전을 위하여 동절기 공사를        중지하여야 한다는 의견이 제출되어 검토한바,

적정한 품질확보를 위해 동절기 이후 공사를 재개하는 것이 타당하다고        사료되어 불가피하게 준공기한을 연기하여야 할 실정임.

	3		조 치 의 견

○ 상기와 같은 실정으로 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자       합니다.

․ 당초 용역기간 : 2014. 10. 31 ~ 2014. 12. 31

․ 변경 용역기간 : 2014. 10. 31 ~ 2015. 05. 31

․ 지체상금부과여부 : 미부과

끝.