투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	계약변경의뢰-[경춘선 폐선부지 공원화 전기공사]

우리부에서 시행중인 「경춘선 폐선부지 공원화 전기공사」와 관련 준공(납품)기한 변경 사항이 발생되어 아래와 같이 변경계약을 요청합니다.

1. 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원화 전기공사

2. 계약번호 : 20131*******01

3. 시 공 사 : 시대전기(주), 대표: 김정숙

4. 계약금액 : ￦154,316천원

5. 공사기간 : 2013.10.10. ~ 2015.01.09.

6. 변경내용

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
전기공사 (1차,총차)	2015.01.09	2015.02.15	(증)37일
공원등주 (명도산업)	2014.12.25	2015.02.15	(증)52일	납품요구번호 121415434600
공원등기구 (엠케이)	2014.12.25	2015.02.15	(증)52일	납품요구번호 121425652600

※ 계약금액 변동없음.

- 사유 : 공원조성 선행공정(조경) 지연 따른 변경.

7. 예산과목

푸른도시국 공원조성과, 생활권공원확충, 도심공원확충,

경춘선 폐선부지 공원조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 변경 검토보고서    1부.    끝.

	설비부장
주무관	이동기		환경설비과장	이달영		설비부장	12/26 박기형
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-14851	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8630	/전송	02-3708-8659	/	ilovey2@seoul.go.kr	/	대시민공개