문서번호	시설개선과-10195
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관		시설개선과장
우인식		12/26 代박관현
협 조
	주무관			박관현

『잠실야구장 유피애스실 건축공사』 설계변경 검토 보고서(정산)

2014. 12.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

『잠실야구장 유피애스실 설치 건축공사』

설계변경 검토 보고서(정산)

『잠실야구장 유피애스실 설치 건축공사』 시행 중 준공전 제경비 정산을 위한 설계변경이 필요한 부분이 있어 검토하고 보고함.

1		공 사 개 요

1. 공 사 명 : 잠실야구장 유피에스실 설치 건축공사

2. 공사기간 : 2014. 10. 31 ~ 2014. 12. 29

3. 시 공 자 : ㈜유아개발시스템 대표 김상호

4. 계약금액 : 금64,068,900원

5. 주요 공사내용

- 잠실야구장 유피에스실 68㎡,  간이샤워장 9㎡ 건축공사

2		변경사항 검토

□ 검토사항

(단위 : 천원)

공 종	현황 및 문제점	검 토 의 견	소요예산 (순공사비)
∘ 보험료 정산	∘ 법정보험료(국민건강․연금보험료, 노 인장기요양보험료, 환경보전비, 건설하도급급보증수수료, 건설기계대여보증 수수료)정산	∘ 정산 요함	감 148
소 계			감 148
제경비(일반관리비,이윤 등)			감 51
합 계			감 199

□ 사업비 변경 현황

(단위 : 원)

사 업 명	금 액	계약금액 (A)	금회 설변보고(B)	비 고 (B-A)
잠실제2수영장다이빙장 보수공사	도급 공사비	64,068,900	62,078000	감 1,990,900
	관급공사비	0	0	0
	총 공사비	64,068,900	62,078,000	감 1,990,900

3		조 치 의 견

□ 위와 같이 보험료 등 정산 설계변경 처리코자 함