함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사』를 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사

나. 공사규모

○ 외곽 보안등 75본 설치, LED 광원개선 145등, 분전반 1면, 기타 케이블 및 배관공사 1식 등

다. 계약기간 : 2014. 7.21 ~ 2014.12.26

라. 계약업체 : 주식회사 태강 대표 김상민

마. 설계변경 금액 내역                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	143,478,370	134,020,000	감 9,458,370

바. 설계변경사유 : 신규공종 및 시공물량 증․감사항 발생 및 보험료 정산

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙 임 :  1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의위원회 심의결과 보고서 1부

3. 설계변경 심의위원회 개최 의견서 1부

4. 합의서 1부

5. 제비율검증 1부.  끝.       ※추산필 : 183번(12/26)

주무관	박희준		주무관	유혜영		정수시설과장	김창현		광암아리수정수센터소장	12/26 차윤기
협조자
시행	정수시설과-3528	(		)	접수		(		)
우	465-230	경기 하남시 광암동 174 광암아리수 정수센터 보수과	/
전화	02-3146-5372	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개