투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
수신	도로교통공단이사장
(경유)	서울특별시지부 안전시설부
제목	2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경 승인회신

1. 도로교통공단 서울특별시지부 안전시설부-65(2014.12.23.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감리업무를 수행 중인 2014년 도로교통 소통개선 사업 교통신호기 공사 설계변경 기술검토의견서 제출에 대하여 아래와 같이 승인하고 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간: 2014. 8. 14. ~ 2015. 2. 9.

다. 도 급 자: 신흥트래픽(주) 대표 윤선희

라. 설계변경 승인내용

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감 액	비 고
공급가액	14,144,546원	62,380,000원	증)48,235,454원
부 가 세	1,414,454원	6,238,00원	증)4,823,546원
도 급 비	15,559,000원	68,618,000원	증)53,059,000원	물량증가 (추가규제)

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 12/26 장경옥
협조자	주무관	구희천
시행	기전과-12033	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개